ANEKS NR 1
do Umowy nr 3657/KT/2013 z dnia 05.11.2013 r. 

zawarty w dniu ……………………… w Katowicach, pomiędzy:
Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, 
reprezentowanym przez:
1. ……………………………….             -    ……………………………..
2. ……………………………….             -    …………………………….. 
a 
KOST-BET Krzysztof Matyja, Paweł Matyja Spółka Jawna z siedzibą pod adresem: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 15, posiadającą REGON: 150386285 i NIP 573-22-54-961, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Częstochowie, pod numerem KRS 0000125401, reprezentowaną przez: 
KRZYSZTOFA MATYJA,
PAWŁA MATYJA

o treści następującej:	
§ 1
Na podstawie § 7 Umowy nr 3657/KT/2013 z dnia 05.11.2013 r. Strony postanawiają wprowadzić następujące zmiany:
A. § 6 ust. 7 przyjmuje brzmienie: „KOST-BET Spółka Jawna zobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu drogowego w terminie do dnia 31.12.2014 r. po wcześniejszym dokonaniu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 6.”,
B. § 9 przyjmuje brzmienie: „Niniejsza umowa obowiązuje do dnia podpisania przez KOST-BET Spółka oraz Zarząd Województwa Śląskiego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust. 1”.

§ 2
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 3
Niniejszy aneks nr 1 sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zarządu Województwa Śląskiego oraz jeden dla KOST-BET Spółka Jawna.
	
Zarząd Województwa Śląskiego		 KOST-BET Spółka Jawna