Załącznik do Uchwały nr 445/319/IV/2014
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 18.03.2014 r.
Aneks Nr 4 
z dnia .................... 2014 r. 
do Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. wraz z Aneksem nr 1  z dnia 24.12.2012 r., Aneksem nr 2  z dnia 14.03.2013 r. oraz Aneksem nr 3  z dnia 9.12.2013 r. powierzającego Miastu Racibórz prowadzenie zadania pn.: „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”
zawarty pomiędzy :
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach: 	
..............................................	............................................. 	
..............................................	............................................. 	
a 	
Miastem Racibórz, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie umowy o współpracy z dnia 28 lutego 2012 r., reprezentowanym przez Prezydenta Mirosława Lenka 
	
§ 1. 
Na podstawie § 8  ust. 2  Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. Strony wprowadzają następującą zmianę: 
A. § 1  ust. 6  przyjmuje brzmienie: „Zakłada się realizację zadania w latach 2012 – 2016".
B. W § 4b dodaje się lit. e. o następującej treści: "e. dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz hydrogeologicznej".
C. Po § 4b dodaje się § 4c o następującej treści: 
"§ 4c.
1. W roku 2014 koszt zadania wynikający z harmonogramu prac projektowych wynosi 327.672 zł z tego 212.986,80 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 114.685,20 zł po stronie Miasta Racibórz.
2. Wynikający z harmonogramu prac projektowych, zakres prac w roku 2014 obejmuje: 
- wykonanie projektu koncepcyjnego przebiegu wraz z materiałami do Karty informacyjnej i Raportu oddziaływania na środowisko,
- wykonanie inwentaryzacji środowiskowej,
- przeprowadzenie konsultacji społecznych,
- wykonanie karty informacyjnej i raportu oddziaływania na środowisko,
- wykonanie oceny stanu technicznego istniejącej konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie pomiarów ruchu drogowego.
3. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej w kwocie łącznej określonej w ust. 1  na pisemne wnioski Prezydenta, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w poniższych transzach: 
1) transza w wysokości do 186.960,00 zł, w tym środki stanowiące pomoc finansową Miasta Racibórz oraz środki własne, w odpowiednich udziałach określonych w § 4  ust. 2  i ust. 4 po wykonaniu projektu koncepcyjnego przebiegu wraz z materiałami do Karty informacyjnej i Raportu oddziaływania na środowisko,
2) transza w wysokości do 49.200,00 zł, w tym środki stanowiące pomoc finansową Miasta Racibórz oraz środki własne, w odpowiednich udziałach określonych w § 4  ust. 2  i ust. 4 po wykonaniu inwentaryzacji środowiskowej,
3) transza w wysokości do 19.680,00 zł, w tym środki stanowiące pomoc finansową Miasta Racibórz oraz środki własne, w odpowiednich udziałach określonych w § 4  ust. 2  i ust. 4 po przeprowadzeniu konstultacji społecznych,
4) transza w wysokości do 49.200,00 zł, w tym środki stanowiące pomoc finansową Miasta Racibórz oraz środki własne, w odpowiednich udziałach określonych w § 4  ust. 2  i ust. 4 po wykonaniu karty informacyjnej i raportu oddziaływania na środowisko,
5) transza w wysokości do 2.952,00 zł, w tym środki stanowiące pomoc finansową Miasta Racibórz oraz środki własne, w odpowiednich udziałach określonych w § 4  ust. 2  i ust. 4 po wykonaniu oceny stanu technicznego istniejącej konstrukcji nawierzchni,
6) transza wysokości do 19.680,00 zł, w tym środki stanowiące pomoc finansową Miasta Racibórz oraz środki własne, w odpowiednich udziałach określonych w § 4  ust. 2  i ust. 4 po wykonaniu pomiarów ruchu drogowego.
4. Do wniosków, o których mowa w ust. 3  należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu częściowego lub końcowego odbioru dokonanego przez Miasto Racibórz, zgodnie z § 6  ust. 3  oraz rachunków i faktur i pozytywnych opinii ZDW lub GDDKiA do każdej części składowej opracowania. W przypadku braku konieczności opiniowania przez ZDW lub GDDKiA określonej części składowej opracowania,  Miasto Racibórz uzyska pismeną informację z ZDW lub GDDKiA.
5. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy opracowania kary te podlegają zwrotowi na wskazany rachunek bankowy Województwa Śląskiego, w części równej udziałowi Województwa Śląskiego w kosztach realizacji opracowania określonej w § 4  ust. 4  wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą.
6. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego. "
§ 2. 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony. 
§ 3. 
Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian. 
§ 4. 
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
§ 5. 
Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla 
Miasta Racibórz oraz dwa dla Zarządu Województwa Śląskiego. 

Województwo Śląskie 								Miasto Racibórz