Aneks 2
z dnia .................... 2013 r.
do Porozumienia nr 195/KT/2013 z dnia 25.06.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Panki prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach”
Na podstawie art. 19 ust. 4  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z póżn. zmianami)
pomiędzy : 
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach: 	
…………………………. 	Wicemarszałka Województwa Śląskiego 	
………………………….	Członka Zarządu Województwa Śląskiego 	
a 	
Gminą Panki, z siedzibą w Pankach przy ul. Tysiąclecia 5  reprezentowaną przez Wójta Bogdana Praskiego	

zostaje zawarty Aneks nr 2  do Porozumienia nr 195/KT/2013 o następującej treści: 
	
§ 1. 
Na podstawie § 10 ust. 2  Porozumienia nr 195/KT/2013 z dnia 25.06.2013 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 31.10.2013 r. strony postanawiają zmienić: 
1. § 1  ust. 6  na następujące: „Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1  rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5  ust. 3  niniejszego porozumienia na 20 grudnia 2014 r. '', 
2. § 2  ust. 2  na następujące: " Gmina Panki uczestniczy w 2014 r. w kosztach realizacji zadania w wysokości 100 % kosztu określonego w ust. 1.'', 
3. § 2  ust. 3  na następujące: "Gmina Panki posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego w 2014r.'', 
4. § 6  ust. 1  na następujące: „Gmina Panki  wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2  ust. 8, w terminie do 31 grudnia 2014 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w § 2  ust.1. ”, 
5. § 6  ust. 2  na następujące: „Gmina Panki  zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w terminie do 31 stycznia 2015 r. zgodnie z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. '', 
6. § 11 na następujące: „Porozumienie w zakresie przygotowania i sfinansowania prac określonych w § 1  ust. 3  zawiera  się na okres  do 31 grudnia 2014 r. ''. 
§ 2. 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony. 
§ 3. 
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 
§ 4. 
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
§ 5. 
Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
Województwo Śląskie	Gmina Panki