Uchwała nr 1291/264/IV/IV/2013
	Zarządu Województwa Śląskiego
	z dnia 18.06.2013 r.
w sprawie:
zatwierdzenia zaktualizowanych harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz zawarcia aneksów  do umów dotacji dla zadań współfinansowanych w roku 2012 środkami z budżetu Województwa Śląskiego, realizowanych w ramach programu                             „Moje boisko – Orlik 2012”
na podstawie art.41 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596).
Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1
Zatwierdza się zaktualizowane harmonogramy rzeczowo – finansowe oraz zawiera się aneksy  do umów dotacji dla zadań współfinansowanych w roku 2012 środkami z budżetu Województwa Śląskiego, realizowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”  przez następujących Beneficjentów:
1.	Gminę Niegowa - umowa nr  3333/IW/2012, przedłużenie terminu zakończenia zadania ze środków własnych  do 31 grudnia  2013 r.,
2.	Gminę Panki - umowa nr 3574/IW/2012, przedłużenie terminu zakończenia zadania                   ze środków własnych  do 31 sierpnia  2013 r.,
3.	Gminę Ujsoły - umowa nr 3330/IW/2012, przedłużenie terminu zakończenia zadania                       ze środków własnych  do 31 sierpnia  2013 r.
Projekt aneksu  stanowi załącznik do  niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się  Marszałkowi Województwa Śląskiego. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
1.	Mirosław Sekuła		–	Marszałek Województwa		….……...….
2.	Mariusz Kleszczewski 		– 	Wicemarszałek Województwa	….……...….
3.	Aleksandra Gajewska 		– 	Wicemarszałek Województwa	…………….
4.	Stanisław Dąbrowa		–	Członek Zarządu			…………….
5.	Arkadiusz Chęciński		–	Członek Zarządu			…………….