Uchwała Nr  158/225/IV/2013
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie
wyrażenia zgody wydłużenie terminu na osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu oraz zmianę terminu od którego liczony będzie okres trwałości projektu pn. „Budowa kompostowni osadów ściekowych "Pszczyna" w Jankowicach przy ul. Złote Łany”, umowy nr UDA-RPSL.05.02.00-00-001/08-00 o dofinansowanie, której Beneficjentem jest Gmina Pszczyna
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt 1; art. 26 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1
Przedłużenie terminu na osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu do 31 grudnia 2013 r., a tym samym zmianę terminu rozpoczęcia okresu trwałości projektu - liczonego od dnia podpisania Uchwały w przedmiotowej sprawie przez Zarząd Województwa Śląskiego, dla projektu pn. „Budowa kompostowni osadów ściekowych "Pszczyna" w Jankowicach przy ul. Złote Łany”, realizowanego w ramach Priorytetu V – Środowisko RPO WSL, którego Beneficjentem jest Gmina Pszczyna.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa	                             ………………………….
Mariusz Kleszczewski – Wicemarszałek Województwa                     ………………………….
Aleksandra Gajewska - Przydryga  - Wicemarszałek Województwa   …………………………
Aleksandra Banasiak - Członek Zarządu Województwa                      …………………………
Jerzy Gorzelik - Członek Zarządu Województwa	                              …………………………