Załącznik do Uchwały Nr 3291/206/IV/2012
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 22.11.2012r.
ANEKS NR 3  
do Umowy nr 1334/KT/2009 z dnia 27 maja 2009r. na świadczenie wybranych usług
w zakresie zarządzania projektem „Stworzenie 	połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz
z przebudową obiektów inżynierskich”
zawarty w dniu ……………………….
pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:
1.	………………………………………… - …………………………………………………
2.	………………………………………… - …………………………………………………
z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”  
a
Grontmij Polska Sp. z o.o. zarejestrowaną w krajowym rejestrze sądowym 
pod numerem KRS 0000140225 
reprezentowaną przez 
Dariusza Terleckiego – Dyrektora Oddziału Południe legitymującego się dowodem osobistym serii ATD o numerze 755685, działającego na mocy pełnomocnictwa
z dnia 17 czerwca 2011r. do podpisania niniejszego aneksu udzielonego przez Prezesa Zarządu Macieja Chrzanowskiego
z siedzibą w Poznaniu, 60-164 przy ul. Ziębickiej nr 35 
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 522-000-41-90
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”

§ 1
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień  publicznych strony postanawiają wprowadzić następujące zmiany:

1.	W § 2 ust. 6. przyjmuje brzmienie: „6. Warunkiem niezbędnym dokonania przez Zamawiającego płatności za ETAP IV jest osiągnięcie przez Wykonawcę celu ostatecznego świadczonej usługi, o którym mowa w § 1 i § 2 ust. 1 – 4 Umowy, przed upływem 55 miesięcy i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz przetargu na wybór wykonawcy do sprawowania nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenie raportu końcowego.”
2.	§ 4 przyjmuje brzmienie: „§ 4 Termin wykonania umowy: w czasie do 55 miesięcy od dnia podpisania umowy.”
§ 2
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 
§ 3
Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowej umowy.

§ 4
Aneks sporządzony został w trzech egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA