Załącznik do Uchwały nr 2880/196/IV/2012
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 16.10.2012 r. 

ANEKS nr 1
z dnia .........................

Do Umowy nr 1423/KT/2012 z dnia 27.04.2012 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Miasto i Gminę Sośnicowice na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 od km 32+299,42 do km 33+174,14 w Sośnicowicach – etap I”
zawarty pomiędzy :

Miastem i Gminą Sośnicowice, z siedzibą w Sośnicowicach przy Rynku 19 reprezentowanym przez Burmistrza Marcina Stronczka 
a
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa 
w osobach:
Adama Matusiewicza					Marszałka Województwa Śląskiego
Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi				Wicemarszałka Województwa Śląskiego

§ 1

Na podstawie § 2 ust. 4 i § 4 ust. 2 Umowy nr 1423/KT/2012 z dnia 27.04.2012 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:
1.	§  2 ust. 1 na następujące: „Całkowity koszt zadania wynosi 641.778 zł (sześćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych).”
2.	§  2 ust. 2 na następujące: „Miasto i Gmina Sośnicowice  udziela Województwu Śląskiemu pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 40 % kosztu zadania określonego 
w ust. 1 tj. 256.711 zł.”
3.	§  2 ust. 3 na następujące: „Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania 
w wysokości 60 %  kosztu zadania  określonego w ust. 1 tj. 385.067 zł”.
§ 2
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.
§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. 
§ 4

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie						                           Miasto i Gmina Sośnicowice