Uchwała nr 1379/155/IV/2012  
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 29.05.2012 r.
	w sprawie:

zatwierdzenia zaktualizowanego  harmonogramu  rzeczowo – finansowego  oraz zawarcia aneksu  do umowy dotacji dla zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Chorzowie przy                    ul. Kościuszki (dz. Nr 4256/28)

na podstawie art.41 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz.U.  z 2001 r. Nr 142 poz.1590 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1
1.	Zatwierdza się zaktualizowany harmonogram  rzeczowo–finansowy zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym)                         w Chorzowie przy ul. Kościuszki (dz. Nr 4256/28), który stanowi załącznik nr 1                         do niniejszej uchwały. 

2.	Zawiera się aneks nr 3 do umowy dotacji nr 1382/IW/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.                   dla zadania jak w pkt 1, przedłużający termin jego zakończenia ze środków własnych Miasta Chorzów  do dnia 30 czerwca  2012 r.
Projekt aneksu nr 3  stanowi  załącznik  nr 2 do  niniejszej  uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się  Marszałkowi Województwa Śląskiego. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
1.	Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa				……….........
2.	Mariusz Kleszczewski – Wicemarszałek Województwa			….……...….
3.	Aleksandra Gajewska – Przydryga – Wicemarszałek Województwa	…………….
4.	Aleksandra Banasiak – Członek Zarządu					…………….
5.	Jerzy Gorzelik – Członek Zarządu						…………….