Załącznik do
uchwały nr 318/120/IV/2012
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 7.02. 2012 r.
Harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie opracowania Programu prac urządzeniowo - rolnych
dla Gminy Krzepice – obszar wiejski o powierzchni 5128 ha
przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie

Etap	Treść zadania	Termin realizacji etapu	
I	1. Nawiązanie współpracy z urzędem gminy i sołectwami.
2. Pozyskanie danych źródłowych i inne prace przygotowawcze:
- przygotowanie bazy informatycznej, jako podstawy do programowania prac urządzeniowo–rolnych 
  w zakresie danych:
•	ewidencji gruntów,
•	planu zagospodarowania przestrzennego,
•	granicy rolno-leśnej,
•	zasobów, wydobycia złóż i kopalin naturalnych
•	spisu rolnego,
•	urzędu statystycznego,
•	melioracji podstawowych i szczegółowych,
- innych istniejących opracowań.	do
31.05.2012 r.	
II	1. Inwentaryzacja stanu istniejącego:
- inwentaryzacja terenowa w zakresie:
•	lasów,
•	terenów zdewastowanych i zaniedbanych,
•	zadrzewień i zakrzewień,
•	dróg,
•	rowów,
•	terenów podmokłych i oczek wodnych
- wykonanie dokumentacji fotograficznej.	do
31.08.2012 r.	
III	1. Analiza stanu istniejącego:
- analiza stanu istniejącego na podstawie pozyskanych materiałów
  źródłowych i inwentaryzacji terenowej,
- opracowanie wniosków z analizy stanu istniejącego.
2. Konsultacje społeczne.
3. Ustalenia programu prac urządzeniowo- rolnych:
- ustalenie rodzaju i zakresu niezbędnych zabiegów urządzeniowo-rolnych,
- ustalenie kolejności wykonywania zabiegów urządzeniowo – rolnych.
4. Opracowanie projektu „Programu prac urządzeniowo –rolnych”:
- opracowanie wniosków na podstawie analizy stanu istniejącego i ustaleń programu prac urządzeniowo–rolnych,
- opracowanie map przeglądowych w formie cyfrowej i drukowanej w zakresie:
•	Gospodarka wodna i poprawa warunków wodnych
•	Istniejąca sieć drogowa
•	Istniejące i planowane zainwestowanie terenu
•	Planowana modernizacja sieci dróg transportu rolnego
•	Krajobraz przyrodniczy oraz jego ochrona
•	Rodzaj i zakres planowanych prac urządzeniowo-rolnych
5. Konsultacja społeczna „Programu prac urządzeniowo – rolnych”.
6. Opracowanie treści „Programu prac urządzeniowo- rolnych” zgodnie z „Założeniami do opracowania programu  prac urządzeniowo – rolnych dla Województwa Śląskiego”.	do
30.11.2012 r.	
Koszt realizacji Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Krzepice – obszar wiejski	106 966 zł