Uchwała nr 3461/106/IV/2011  
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 15.12.2011 r.
	w sprawie:

	zatwierdzenia zaktualizowanych harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz zawarcia aneksów nr 2 do umów dotacji dla zadań realizowanych w roku 2011                            w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

na podstawie art.41 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1590 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1
Zatwierdza się zaktualizowane harmonogramy rzeczowo – finansowe oraz zawiera się aneksy nr 2 do umów dotacji o dofinansowanie środkami z budżetu Województwa Śląskiego dla  zadań realizowanych w roku 2011 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przez następujących Beneficjentów:
1.	Miasto Chorzów - umowa nr 1382/IW/2011, przedłużenie terminu zakończenia zadania ze środków własnych  do końca maja  2012 r.,
2.	Gminę Czernichów - umowa nr 1445/IW/2011, przedłużenie terminu zakończenia zadania ze środków własnych  do końca maja  2012 r.,
3.	Gminę Myszków - umowa nr 1372/IW/2011, zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
4.	Gminę Pyskowice - umowa nr 1374/IW/2011, zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
5.	Gminę Tworóg - umowa nr 1223/Iw/2011, zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
6.	Gminę Zebrzydowice - umowa nr 1378/IW/2011, przedłużenie  terminu zakończenia zadania ze środków własnych  do końca kwietnia 2012 r.

Projekt aneksu nr 2 stanowi załącznik do  niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się  Marszałkowi Województwa Śląskiego. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
1.	Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa				……….........
2.	Mariusz Kleszczewski – Wicemarszałek Województwa			….……...….
3.	Aleksandra Gajewska – Przydryga – Wicemarszałek Województwa	…………….
4.	Aleksandra Banasiak – Członek Zarządu					…………….
5.	Jerzy Gorzelik – Członek Zarządu						…………….