Załącznik nr 1 do uchwały 
Nr 3446/105/IV/2011
z dnia 13.12.2011 roku
Aneks nr 5

do umowy dotacji nr 377/ZD/2010 z dnia 26.02.2010 roku 
zawarty w dniu ....................................pomiędzy:

Województwem Śląskim
reprezentowanym przez:
1.	………………………………………………………………………………………
2.	………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Województwem

a
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich 
wpisanym do rejestru sądowego pod numerem KRS:  0000182167
reprezentowanym przez: 
Dyrektora – Mariusza Nowaka
zwanym dalej Podmiotem

Strony zgodnie postanawiają o następującej treści:

§ 1
Dokonuje się zmiany umowy dotacji nr 377/ZD/2010 z dnia 26.02.2010 roku w następujący sposób :

1) Dokonuje się zmiany § 3 ust. 2 umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 
„Środki finansowe określone w §1 przekazywane będą na rachunek bankowy Podmiotu       na podstawie wniosków częściowych oraz końcowego składanych przez Podmiot, zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2.
Przekazanie środków finansowych w ramach dotacji nastąpi na podstawie dokumentów finansowych (faktur), wystawionych po zawarciu umowy:
- dla części dotacji w kwocie 2 500 000,00 zł przeznaczonej do sfinansowania w 2010 roku, przedłożonych do realizacji do 15.12.2010 roku, 
- dla części dotacji w kwocie 11 550 000,00 zł przeznaczonej do sfinansowania w 2011 roku, przedłożonych do realizacji do 22.12.2011 roku, 
- dla części dotacji w kwocie 15 500 000,00 zł przeznaczonej do sfinansowania w 2012 roku, przedłożonych do realizacji do 15.11.2012 roku, 
- dla części dotacji w kwocie   8 450 000,00 zł przeznaczonej do sfinansowania w 2013 roku, przedłożonych do realizacji do 15.11.2013 roku.”. 

2) Dokonuje się zmiany § 3 ust. 7 umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 
„Wniosek końcowy Podmiot zobowiązany jest przedstawić Województwu w następujących terminach: 
- do 15 grudnia 2010 roku, dla części dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2010 roku   w kwocie   2 500 000,00 zł, 
- do 22 grudnia 2011 roku, dla części dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2011 roku w kwocie 11 550 000,00 zł, 
-  do 15 listopada 2012 roku, dla części dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2012 roku w kwocie 15 500 000,00 zł, 
- do 15 listopada 2013 roku, dla części dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2013 roku w kwocie   8 450 000,00 zł.”.

3) Dokonuje się zmiany § 4 ust. 1 umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 
„Podmiot traci prawo do dotacji (w całości lub w części) w przypadku nie złożenia wniosku końcowego w terminie do: 
- do 15 grudnia 2010 roku, dla części dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2010 roku w kwocie   2 500 000,00 zł, 
- do 22 grudnia 2011 roku, dla części dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2011 roku w kwocie 11 550 000,00 zł, 
- do 15 listopada 2012 roku, dla części dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2012 roku w kwocie 15 500 000,00 zł.
- do 15 listopada 2013 roku, dla części dotacji przeznaczonej do sfinansowania w 2013 roku w kwocie   8 450 000,00 zł.”. 

§ 2
Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

§ 3
Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Podmiotu, a dwa dla Województwa.

           Podmiot				                                Województwo Śląskie