Załącznik do Uchwały Nr 3508/106/IV/2011
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 15.12.2011 r.

Aneks nr 3 / 2011
do Umowy Nr 309/KT/2010 z dnia 19.02.2010 roku na przygotowanie kompletnego wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich” wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko oraz sporządzenie pełnego studium wykonalności dla w/w przedsięwzięcia
zawarty w dniu …………………………
pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:
1.	…………………………………….. - ………………………………………
2.	…………………………………….. - ………………………………………
z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”  
a
Biurem Konsultingowo – Doradczym „Euroekspert” dr inż. Jacek Seweryński zarejestrowanym w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Chorzów pod numerem 22657
reprezentowanym przez: Jacka Seweryńskiego
z siedzibą w Chorzowie przy ul. 17 Sierpnia 16f/6
posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 631-156-00-98
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
przy udziale
firmy Grontmij Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Biuro Regionalne Południe
w Katowicach przy ul. Sokolskiej 65, działającej na podstawie umowy nr 1334/KT/2009
z dnia 27.05.2009r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a firmą Grontmij Polska Sp. z o.o. na świadczenie wybranych usług w zakresie zarządzania projektem „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich” 
zwanej w treści umowy „Zarządzającym projektem”
§ 1
W związku z brakiem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, a co za tym idzie brakiem możliwości dokonania odbioru części dokumentacji – Studium Wykonalności dla wariantu wskazanego do realizacji 
w w/w decyzji środowiskowej, Strony postanawiają wprowadzić następujące zmiany:
1.	W § 7 w ust. 3 wykreśla się kropkę i dodaje się „ i ust. 3 b.”
2.	W § 7 ust. 3a przyjmuje brzmienie: „3a. Z dniem 08.09.2011r. Wykonawca ponownie wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 46 695,50 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy) na okres do dnia 31.12.2011r. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie gwarancji bankowej.” 
3.	W § 7 po ust. 3a dodaje się ust. 3b o następującej treści: „3b. Zabezpieczenie, 
o którym mowa w ust. 3a zostaje przedłużone do dnia 30.06.2012r. poprzez ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….”
§ 2
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 
§ 3
Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowej umowy.
§ 4
Aneks sporządzony został w czterech egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zarządzającego projektem.
 
ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM