Uchwała nr 1075/44/IV/2011
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 28.04.2011 r.

w sprawie:

zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 2725/IW/2010 z dnia 20.10.2010 roku                            na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.
 
na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa                     (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.)
Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1
Zawiera się aneks nr 2 do umowy nr 2725/IW/2010 z dnia 20.10.2010 r. dotyczącej wykonania robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”, w którym wprowadza się  przesunięcie terminu zakończenia robót z dnia 30 kwietnia 2011 r. na dzień 30 czerwca 2011 r

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1.	Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa				……….........

2.	Mariusz Kleszczewski – Wicemarszałek Województwa			….……...….

3.	Aleksandra Gajewska – Przydryga – Wicemarszałek Województwa	…………….

4.	Aleksandra Banasiak – Członek Zarządu					…………….

5.	Jerzy Gorzelik – Członek Zarządu						…………….