Załącznik do Uchwały Nr 372/22/IV/2011
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 17.02.2011r.
UMOWA
zawarta w dniu ……………………… 2011 roku

pomiędzy Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 954-22-60-713, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

1.	…………………………………… – ……………………………………………
2.	…………………………………… – ……………………………………………
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”  
a
EGIS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-21-53-084, zarejestrowaną w krajowym rejestrze sądowym pod numerem KRS 0000036656
reprezentowaną przez 
Pana Remigiusza Rolnika - Dyrektora legitymującego się dowodem osobistym 
nr ………….. działającego na mocy pełnomocnictwa z dnia 08 lutego 2011r.
do podpisania niniejszej umowy, którego udzielił Prezes Zarządu Fédéric Nicolon
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”
przy udziale
firmy Grontmij Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Biuro Regionalne Południe 
w Katowicach przy ul. Sokolskiej 65, działającej na podstawie umowy nr 1334/KT/2009 
z dnia 27.05.2009r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a firmą Grontmij Polska 
Sp. z o.o. na świadczenie wybranych usług w zakresie zarządzania projektem „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich” 
zwanej w treści umowy „Zarządzającym projektem”
na podstawie wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na:
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany 
i wykonawczy wraz ze skompletowaniem dokumentacji formalno – prawnej 
i geodezyjnej umożliwiającej uzyskanie własności gruntów pod inwestycję dla przedsięwzięcia „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich”
nr sprawy ZP/B/148/10, przeprowadzonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawarta została umowa następującej treści:
§ 1
1.	Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1.	Opracowanie koncepcji programowej.
1.2.	Opracowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami.
1.3.	Przygotowanie projektu budowlanego. 
1.4.	Przygotowanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim.
2.	Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zarządzającego projektem do wykonania kopii opracowanej dokumentacji w terminie do 5 dni, za odrębnym wynagrodzeniem uwzględniającym jedynie koszty materiałów i reprodukcji. 
3.	Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania zawarte w SIWZ, obowiązujące normy, przepisy prawne i decyzje organów administracyjnych. Opracowywana dokumentacja projektowa winna ponadto uwzględniać postanowienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, której uzyskanie jest planowane do końca lutego 2011 roku.
4.	Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zakres możliwych zmian i sposób ich wprowadzenia do umowy został określony w § 15.
5.	Projekt ten znajduje się na liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. W związku z powyższym przygotowana dokumentacja winna być zgodna z obowiązującymi przepisami dla projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2007-2013.
6.	Wykonawca będzie przedkładał Zarządzającemu projektem comiesięczne sprawozdania 
z wykonanych czynności i prac dotyczących realizacji niniejszej Umowy w terminie 
do 3 dnia następnego miesiąca.
7.	Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zarządzającym projektem na każdym etapie wykonania umowy oraz do udzielania pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy.
§ 2
1.	W ramach realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca wykona czynności opisane w SIWZ wraz z załącznikami.
2.	Po przekazaniu Zarządzającemu projektem dokumentacji zgodnie z terminami realizacji określonymi w § 4, Zarządzający projektem potwierdzi dostarczenie dokumentacji podpisując „protokół przekazania”. Podpisanie przez Zarządzającego projektem „protokołu przekazania” stanowi pokwitowanie odbioru dokumentacji jedynie pod względem ilościowym i nie stanowi odbioru przedmiotu umowy.
3.	W terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę i Komisję Odbioru składającą się
z przedstawicieli Zarządzającego projektem i Zamawiającego. W tym terminie Komisja Odbioru dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji pod kątem zgodności jej wykonania z umową.
4.	Protokół odbioru, o którym mowa w pkt. 3 powinien zawierać w szczególności:
a)	dzień i miejsce odbioru,
b)	stwierdzenie Komisji Odbioru o istnieniu lub braku wad w wykonaniu części zamówienia.
5.	W przypadku stwierdzenia wad – Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad
w terminie określonym przez Komisję Odbioru w protokole odbioru, w ramach wynagrodzenia, określonego w § 5. Stwierdzenie usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
6.	Po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę poprawionej dokumentacji projektowej, procedura przekazania i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie. W przypadku stwierdzenie przez Komisję Odbioru kolejnych wad w przekazanej dokumentacji Zamawiający będzie mógł odstąpić od realizacji umowy na zasadach określonych
w § 8. 
7.	W przypadku konieczności wykonania przez Zarządzającego projektem koreferatu 
do przekazanej dokumentacji, weryfikacja przekazanej dokumentacji może być wydłużona o czas niezbędny dla wypracowania jednoznacznej oceny przekazanej dokumentacji. 
Na opracowanie koreferatu Zarządzający projektem przewiduje do 30 dni roboczych.
8.	Zamawiający zatrzyma 30% wynagrodzenia netto za projekt budowlany do czasu uzyskania przez Zarządzającego projektem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ale nie dłużej niż 12 miesięcy od daty odbioru projektu budowlanego. 
9.	Zamawiający może, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy przez Zarządzającego projektem, wstrzymać w całości pozostałe wynagrodzenie należne Wykonawcy, jeżeli dopuścił się on uchybień w wykonaniu przedmiotu zamówienia tj. nie osiągnie
w określonym czasie efektów wyszczególnionych w Umowie.
10.	W przypadku opisanym w pkt. 9, Wykonawca uzgadnia z Zarządzającym projektem warunki, w tym terminy uzupełnienia zaistniałych zaległości, których dochowanie stanowić będzie warunek uruchomienia wstrzymanych płatności.
11.	Po zrealizowaniu pełnego zakresu usługi, o którym mowa w § 1 i w § 2 pkt. 1 oraz w terminie, o którym mowa w § 4, Wykonawca przedstawi Zarządzającemu projektem Raport końcowy z wykonanych czynności i prac dotyczących realizacji niniejszej Umowy 
w terminie do 7 dni po zakończeniu prac projektowych.
12.	Faktury VAT zostaną wystawione przez Wykonawcę na Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP: 954-22-60-713. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie Protokół Odbioru bez zastrzeżeń.
13.	Data sprzedaży usługi wpisana na fakturze powinna być zgodna z datą sporządzenia protokołu odbioru.
14.	Kwota do zapłaty ujęta w fakturze winna być podzielona na dwie części. Wykonawca oszacuje wartość części dokumentacji związanej z miastem Katowice i miastem Mysłowice i na każdej fakturze wyszczególni dwie pozycje: dokumentacja dotycząca Katowic 
i dokumentacja dotycząca Mysłowic. 
15.	Faktury będą wpływały bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
16.	Faktura płatna będzie przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu. 
17.	Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
§ 3
Wszystkie procedury, opracowania projektowe, dokumentacje oraz inne usługi, o których mowa w § 1 i w § 2 pkt. 1, Wykonawca zobowiązany jest wykonywać bądź doprowadzać 
do wykonania przez zgłoszonych w ofercie podwykonawców w oparciu o stan prawny obowiązujący w okresie ich realizacji.
§ 4
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 30.09.2011r. z następującymi zastrzeżeniami:
a)	Koncepcja programowa – do 31.03.2011r.
b)	Kompletny wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami – do 20.06.2011r.
c)	Projekt budowlany – do 15.06.2011r. 
d)	Projekt wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim – do 30.09.2011r. 
§ 5
1.	Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie umowne na łączną cenę brutto: 1 166 655,00 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych zero groszy), netto: 948 500,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych zero groszy) oraz podatek VAT 23 % tj. 218 155,00 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych zero groszy).
2.	Ustala się następujące procentowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:
a)	koncepcja programowa – 20% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w pkt. 1
b)	kompletny wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami (bez projektu budowlanego) - 20% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w pkt. 1
c)	projekt budowlany - 30% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego
w pkt. 1
d)	projekt wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim – 30% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w pkt. 1 – płatność końcowa.
3.	Wypłata umownego wynagrodzenia w wysokości określonej w pkt.2 następować będzie 
po wykonaniu zakresu prac w terminach określonych w § 4, z zastrzeżeniem regulacji określonej w § 2 pkt.8.
4.	Wynagrodzenie to zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, 
w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, 
o których mowa w § 9, do wyników prac powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.
§ 6
1.	Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
a)	Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy,
b)	Wykonawca odmawia wykonania zaleceń Zarządzającego projektem w zakresie realizacji niniejszej umowy,
c)	Wykonawca podzleca usługi bez uzgodnienia z Zarządzającym projektem,
d)	Wykonawca zawiesza swoją działalność,
e)	w razie wystąpienia innych okoliczności utrudniających bądź też uniemożliwiających wykonanie umowy.
2.	Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części przedmiotu umowy 
z podwykonawcą na zakres robót wskazany w ofercie, co nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za wykonanie tej części umowy.
3.	Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji, tj. zakazu przenoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
na osoby trzecie bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
4.	Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie wady prawne 
i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione, lub mogące się ujawnić w przyszłości.
5.	Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy przez okres 12 miesięcy od następnego dnia 
po odbiorze ostatniej części opracowania projektowego tj.  projektu wykonawczego wraz 
z kosztorysem inwestorskim.
6.	Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres dwóch lat na wykonaną dokumentację projektową, zgodnie z zapisami gwarancji przedstawionymi w Załączniku nr 1 do umowy, który stanowi integralną część umowy. 
7.	W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, po pisemnym zgłoszeniu wady, 
do usunięcia wad ujawnionych w dokumentacji opracowanej w ramach umowy,
w terminie wskazanym przez Zarządzającego projektem lub Zamawiającego. W razie nieprzystąpienia do usuwania wady w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, albo nieusunięcia wady w terminie do 30 dni, Zarządzający projektem lub Zamawiający uprawniony będzie w ramach gwarancji do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej 
na koszt Wykonawcy. 
8.	W przypadkach uzasadnionych względami technicznymi lub formalno – prawnymi, które uniemożliwiają usunięcie wady w terminie do 30 dni, strony ustalą termin usunięcia wady lub dostarczenia dokumentacji wolnej od wad.
9.	Dla części, co do której zgłoszono usunięcie wad w ramach gwarancji, termin gwarancji biegnie na nowo od daty usunięcia wad.
10.	Za zwłokę w usunięciu wad Wykonawca zapłaci, zgodnie z § 8, karę w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień zwłoki.
11.	W razie powierzenia usunięcia wad, o którym mowa w pkt. 7, do wykonania osobie trzeciej, uprawniona będzie ona do realizowania uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
§ 7
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej wartości umowy brutto w następujących formach (do wyboru):
a)	w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Województwa Śląskiego w GETIN Banku S.A. II Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 25a, 40-039 Katowice
nr 09 1560 1111 0000 9070 0003 5309, tytuł przelewu: zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu nr ZP/B/148/10,
b)	w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c)	w gwarancjach bankowych,
d)	w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)	w poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi: 58 332,75 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy).
3.	Zabezpieczenie zostało wniesione w dniu …………………………… roku w formie gwarancji bankowej.
4.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu na jego poczet, o ile Wykonawca wyrazi zgodę, może być zaliczona kwota wadium.
5.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy na jego wniosek w następujących terminach i wysokościach: 
5.1. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń ostatniego opracowania projektowego tj. projektu wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim 
5.2. 30% kwoty zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 
6. W przypadku stwierdzenia wad trwałych w realizacji usługi kwota zabezpieczenia 
nie zostanie zwrócona Wykonawcy.
§ 8
1.	W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z terminem jej realizacji określonym w § 4 Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto określonej w § 5 za każdy dzień zwłoki.
2.	W razie odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn, 
o których mowa w § 6 pkt.1 ppkt a) - e) Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 5, 
na której poczet, jako połowa wartości, zaliczona byłaby wówczas kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3.	W razie odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty Zamawiającemu kary umownej 
w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w § 5. 
4.	W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
5.	Zarządzający projektem może zlecić koreferat (sprawdzenie) dokumentacji projektowej. 
W przypadku stwierdzenia wad (błędów) w dokumentacji projektowej Zamawiający kosztami sporządzenia koreferatu obciąży Wykonawcę dokumentacji projektowej.
§ 9
1.	Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do wyników prac powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy i że przenosi autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego nieodpłatnie na następujących polach eksploatacji:
a)	w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy przedmiotu umowy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, techniką zapisu komputerowego;
b)	w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c)	w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony 
w ppkt. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i ponowna publikacja, a także publiczne udostępnianie tekstów oraz innych  materiałów zamieszczanych w materiałach w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
d)	jego wypożyczanie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których przedmiot umowy został utrwalony;
e)	sporządzenie wersji obcojęzycznych; 
f)	wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnych - w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.
2.	Wykonawca przenosi prawa do wykonywania prawa zależnego na Zamawiającego.
3.	Wykonawca oświadcza, że jego prawo do wyników prac powstałych w związku 
z wykonaniem przedmiotu Umowy nie jest obciążone prawami osób trzecich, nie stanowi przedmiotu zastawu oraz, że powstrzyma się w czasie trwania Umowy od wszelkich działań skutkujących ewentualną utratą posiadanych praw bądź ich ograniczeniem.
§ 10
Oryginały dokumentów uzyskane przez Wykonawcę w czasie realizacji umowy, po jej zakończeniu będą stanowić własność Zamawiającego.
§ 11
1.	W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa 
i ustalonych zwyczajów.
2.	Jako koordynatora prac wchodzących w zakres obowiązków umownych Zamawiający wyznacza: Lucjana Machowskiego – Zastępcę Dyrektora Wydziału Komunikacji 
i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
3.	Do kontaktów z Zamawiającym i Zarządzającym projektem Wykonawca wyznacza: Remigiusza Rolnika - Dyrektora Biura Projektowego Katowice. 
4.	Zarządzającego projektem w zakresie realizacji niniejszej Umowy reprezentować będzie: Dariusz Terlecki – Dyrektor Biura Regionalnego Południe. 

§ 12
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie:
1)	kodeks cywilny,
2)	ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
§ 13
Ewentualne spory mogące powstać w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zamówienia.
§ 15
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego i opisanych w punkcie 2 i na warunkach opisanych w punktach 3, 4, 5 i 6.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w niżej wymienionych przypadkach:
2.1. Zmiany ogólne
2.1.1. Możliwa jest:
a)	zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy
b)	zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy
c)	zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki
2.1.2. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, sukcesji z mocy prawa.
2.1.3. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie prac, ze względu na:
a)	oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze)
b)	uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.)
c)	zmiany stanu prawnego, zmiany w normach, przepisach powszechnie obowiązujących lub decyzjach organów administracyjnych
2.1.4. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2.2. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie
2.2.1. Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:
a)	ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b)	z rezygnacją z części prac.
3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
3.1. Sposób inicjowania zmian:
3.1.1. Zamawiający:
a)	wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wnioskowanej zmiany,
b)	wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany.
3.1.2. Wykonawca:
a)	wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.
4. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnianie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp.). 
5. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punktach 3 i 4 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.
6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych zapisów jest nieważna.
§ 16
1.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2.	W przypadku, o którym mowa w pkt.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
§ 17
Umowa została sporządzona w czterech egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zarządzającego projektem.
§ 18
Integralną część Umowy stanowią: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy z dnia 16.12.2010 roku złożona w postępowaniu ZP/B/148/10.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM

Załącznik nr 1 do umowy
Gwarancja
WYKONAWCA:
Firma EGIS Poland Sp. z o.o.,  reprezentowana przez ....................................., zgodnie 
z zapisami § 6 pkt. 6 Umowy zawartej w dniu …………… 2011 roku pomiędzy Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, NIP 954-22-60-713, a EGIS Poland 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, NIP: 526-21-53-084 przy udziale Zarządzającego Projektem – firmy Grontmij Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Biuro Regionalne Południe w Katowicach przy ul. Sokolskiej 65
udziela 
Województwu Śląskiemu gwarancji na okres 2 lat od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej tj. od ................... do ...................... na wykonaną niżej wymienioną dokumentację:
1)	Koncepcja programowa
2)	Kompletny wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami
3)	Projekt budowlany 
4)	Projekt wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim
Gwarancja dotyczy zakresu jakości rzeczy i stanowi dodatkowe zastrzeżenie rozszerzające odpowiedzialność WYKONAWCY: Firmy EGIS Poland Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182 na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO: Województwa Śląskiego 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46.
WYKONAWCA odpowiada względem Województwa Śląskiego w przypadku, gdy dokumentacja stanowi własność osoby trzeciej, albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a w razie sprzedaży praw, sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne). 
Gwarancja dotyczy również odpowiedzialności za fizyczne wady ukryte, a w szczególności 
za wady, które ujawnią się podczas realizacji.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, po pisemnym zgłoszeniu wady, 
do usunięcia wad ujawnionych w dokumentacji opracowanej w ramach umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub Zarządzającego projektem. W razie nieprzystąpienia 
do usuwania wady w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, albo nieusunięcia wady w terminie do 30 dni, Zamawiający lub Zarządzający projektem uprawniony będzie w ramach gwarancji do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
W przypadkach uzasadnionych względami technicznymi lub formalno – prawnymi, które uniemożliwiają usunięcie wady w terminie do 30 dni, strony ustalą termin usunięcia wady 
lub dostarczenia dokumentacji wolnej od wad.
Dla części, co do której zgłoszono usunięcie wad w ramach gwarancji, termin gwarancji biegnie na nowo od daty usunięcia wad.
Za zwłokę w usunięciu wad WYKONAWCA zapłaci, zgodnie z § 8 pkt. 1 umowy, karę w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki.
W razie przekazania umowy do wykonania osobie trzeciej, uprawniona będzie ona 
do realizowania uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

..........................	dn. ....................	..................................