Uchwała nr 138/6/IV/2010  
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 23.12.2010 r.

	w sprawie

zatwierdzenia zaktualizowanych harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz zawarcia aneksów  do umów dotacji dla zadań dofinansowanych  w roku 2010 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

na podstawie art.41 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1590 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1
Zatwierdza się zaktualizowane harmonogramy rzeczowo – finansowe oraz zawiera się aneksy do umów dotacji o dofinansowanie środkami z budżetu Województwa Śląskiego dla  zadań realizowanych w roku 2010 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przez następujących Beneficjentów:

1.	Miasto Myszków  – umowa nr 1619/IW/2010, przedłużenie terminu zakończenia zadania ze środków własnych  do końca II kwartału 2011 r. (aneks nr 2), 
2.	Powiat Wodzisławski – umowa nr 1679/IW/2010, przedłużenie terminu zakończenia zadania ze środków własnych  do 31 maja 2011 r. (aneks nr 3)
3.	Gminę Jeleśnia – umowa nr 1674/IW/2010, zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego (aneks nr 2). 

Zaktualizowane harmonogramy rzeczowo – finansowe dla zadań realizowanych przez ww. Beneficjentów oraz projekt aneksu,  stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się  Marszałkowi Województwa Śląskiego. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
1.	Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa				……….........

2.	Mariusz Kleszczewski – Wicemarszałek Województwa			….……...….

3.	Aleksandra Gajewska – Przydryga – Wicemarszałek Województwa	…………….

4.	Aleksandra Banasiak – Członek Zarządu					…………….

5.	Jerzy Gorzelik – Członek Zarządu						…………….