Załącznik do Uchwały 92/5/IV/2010
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 21.12.2010
Aneks nr 2 
z dnia …………..
do Porozumienia z dnia 2.06.2010 r.  powierzającego Gminie Zebrzydowice prowadzenia zadania p.n.: „Budowa chodnika – utwardzonego pobocza  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w Kończycach Małych” zawarty 

pomiędzy :
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa
w osobach:
…………………………………………..			-	…………………………………………..
…………………………………………..			-	…………………………………………..
a
Gminą Zebrzydowice, z siedzibą w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 6 reprezentowaną przez Wójta Andrzeja Kondziołkę.
§ 1
Na podstawie § 2 pkt. 7, § 4 pkt. 5 i pkt. 6 oraz § 9 Porozumienia z dnia 2.06.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 
23.08.2010 r. strony postanawiają zmienić brzmienie: 
1.	§ 1 pkt. 5 na następujące: „Termin realizacji rzeczowej zadania określonego w pkt. 1 planowany jest do 15 maja 2011 r.”,
2.	§ 2 pkt. 1 na następujące: „Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane oraz koszt nadzoru i wynosi 1.435.259 zł (jeden milion czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych)”,
3.	§ 2 pkt. 2 na następujące: „Gmina Zebrzydowice uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 717.629 zł”,
4.	§ 2 pkt. 3 na następujące: „Gmina Zebrzydowice posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 717.629 zł (siedemset siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych)”,
5.	§ 2 pkt. 4 na następujące: „Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 717.630 zł”,
6.	§ 2 pkt. 5 na następujące: „Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 717.630 zł (siedemset siedemnaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych)”,
7.	§ 3 pkt. 1 na następujące:” Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt. 9 na pisemne wnioski Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia w czterech transzach:
a.	I transza w 2010 r. w wysokości 499.999,99 zł, w całości ze środków z budżetu Województwa Śląskiego, po wykonaniu i odebraniu części zadania, 
b.	II transza w 2010 r. w wysokości do 217.630,01 zł, w całości ze środków z budżetu Województwa Śląskiego, po wykonaniu i odebraniu części zadania, 
c.	III transza w 2011 r. w wysokości do 283.370 zł, w całości ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy, po wykonaniu i odebraniu części zadania, 
d.	IV transza w pozostałej wysokości, w całości ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy, po wykonaniu i odebraniu całości zadania”,
8.	§ 8 na następujące: ”Porozumienie zawiera się na okres do 31 maja 2011r.”
§ 2
Na podstawie § 4 pkt. 8 Porozumienia z dnia 2.06.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 23.08.2010 r. strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aneksu.
§ 3
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 4
Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

§ 6
Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Województwo	Śląskie								Gmina Zebrzydowice