Załącznik do Uchwały nr 3315/429/III/2010
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 30.11.2010

Aneks nr 2
z dnia …………..
do Porozumienia z dnia 12.07.2010 r.  powierzającego Gminie Istebna prowadzenia zadania p.n.: „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941 w Istebnej” zawarty 

pomiędzy :
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa
w osobach:
…………………………………………					Wicemarszałka Województwa Śląskiego

…………………………………………					Członka Zarządu Województwa Śląskiego
a
Gminą Istebna z siedzibą w Istebnej 1000 reprezentowaną przez Wójta Gminy Danutę Rabin.
§ 1
Na podstawie § 2 pkt. 7, § 4 pkt. 5 i pkt.6 oraz § 9 Porozumienia z dnia 12.07.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 26.08.2010 r.  strony postanawiają zmienić brzmienie: 
1.	§ 1 pkt. 6 na następujące: „Termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania określonego w pkt. 1 planowany jest do 31 lipca 2011 r.”. 
2.	§ 2 pkt. 1 na następujące: „Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane oraz koszt nadzoru i wynosi 1.208.813 zł (jeden milion dwieście osiem tysięcy osiemset trzynaście złotych).”,
3.	§ 2 pkt. 2 na następujące: „Gmina Istebna uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 20 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 241.763 zł”,
4.	§ 2 pkt. 3 na następujące: „Gmina Istebna posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego 
w 2011 r. w wysokości 241.763 zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote)”,
5.	§ 2 pkt. 4 na następujące: „Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 80 % kosztu określonego w pkt. 1 tj. 967.050 zł”,
6.	§ 2 pkt. 5 na następujące: „Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2010 r. w wysokości 967.050 zł (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych)”.
7.	§ 3 pkt. 1 na następujące: „Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Istebna środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt. 9 na pisemne wnioski Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia w dwóch transzach:
a.	I transza w 2010 r. w wysokości 967.050 zł, w całości ze środków z budżetu Województwa Śląskiego, po wykonaniu i odebraniu części zadania, 
b.	II transza w 2011 r. w wysokości do 241.763 zł, w całości ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy, po wykonaniu i odebraniu całości zadania”,
8.	§ 8 na następujące: „Porozumienie zawiera się na okres do 31 sierpnia 2011 r.”
§ 2
Na podstawie § 4 pkt. 8 Porozumienia z dnia 12.07.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 26.08.2010 r. strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aneksu.
§ 3
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 
§ 4
Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 5
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

§ 6
Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Województwo	Śląskie						                         Gmina Istebna
  Załącznik do 
Aneksu nr 2 
z dnia …………
do porozumienia z dnia 12.07.2010 r. 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 943 I NR 941 W ISTEBNEJ
Lp.	Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania	Kto wykonuje	Planowany termin realizacji	
		Jest +	Brak -		
1	Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania
	+ 
Gmina , 
Województwo		
2	Dokumentacja projektowa
	+ 
Gmina		
3	
Kosztorys inwestorski
	+ 
Gmina		
4	Regulacja stanu prawnego terenu
	Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 		
5	Decyzja pozwolenie na budowę /zezwolenie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych 
	+ 
Gmina		
6	Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących
realizacji zadania
	+

Gmina,
Województwo		
7	
Przygotowanie SIWZ
	+

Gmina		
8	
Przeprowadzenie postępowania przetargowego
	+

Gmina 		
9	
Podpisanie umowy z  wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą
	+

Gmina		
10	Zakończenie i odbiór zadania
	_

Gmina,
Województwo 	Lipiec 2011 r.	

11
	Przekazanie środków finansowych	_

Województwo 	W transzach nie później niż do sierpnia 2011 r.