Załącznik do Uchwały nr 3314/429/III/2010
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 30.11.2010

Aneks nr 2 
z dnia …………..
do Porozumienia z dnia 15.07.2010 r. powierzającego Gminie Pawłowice prowadzenie zadania p.n.  „Budowa chodnika 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 938 w Jarząbkowicach” zawarty 
pomiędzy :
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa 
w osobach:
…………………………………………					Wicemarszałka Województwa Śląskiego

…………………………………………					Członka Zarządu Województwa Śląskiego
a
Gminą Pawłowice, z siedzibą w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60 reprezentowaną przez Wójta Damiana Galuska.
§ 1
Na podstawie § 9 Porozumienia z dnia 15.07.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.09.2010 r. strony postanawiają zmienić brzmienie: 
1.	§ 1 pkt. 5 na następujące: „Termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania określonego w pkt. 1 planowany jest do 31 maja 2011 r.”,
2.	§ 2 pkt. 3 na następujące: „Gmina Pawłowice posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego 
w 2010 r. w wysokości 254.535 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych), a w 2011 r. 
w wysokości 352.166 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych)”,
3.	§ 3 pkt. 1 na następujące: „Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt. 9 na pisemne wnioski Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia w trzech transzach:
a.	I transza w 2010 r. w wysokości do 500.000 zł, w całości ze środków z budżetu Województwa Śląskiego, po wykonaniu i odebraniu części zadania, 
b.	II transza w 2010 r. w wysokości 354.000 zł, w części ze środków z budżetu Województwa Śląskiego (99.465 zł ) oraz w części ze środków stanowiących pomoc finansową gminy (254.535 zł ), po wykonaniu 
i odebraniu części zadania, 
c.	III transza w 2011 r. w wysokości 352.166 zł, w całości ze środków stanowiących pomoc finansową Gminy, po wykonaniu i odebraniu całości zadania”,
4.	§ 8 na następujące: „Porozumienie zawiera się na okres do 30 czerwca 2011 r.”
§ 2
Na podstawie § 4 pkt. 8 Porozumienia z dnia 15.07.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.09.2010 r. strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aneksu.
§ 3
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 
§ 4
Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.
§ 5
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
§ 6
Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Województwo	Śląskie						                         Gmina Pawłowice

  Załącznik do 
aneksu z dnia ………….
do porozumienia z dnia 15.07.2010 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 W JARZĄBKOWICACH
Lp.	Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania	Kto wykonuje	Planowany termin realizacji	
		Jest +	Brak -		
1	
Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania
	+ 
Gmina , Województwo		
2	
Dokumentacja projektowa
	+ 
Gmina		
3	
Kosztorys inwestorski
	+ 
Gmina		
4	
Regulacja stanu prawnego terenu
	Uzyskano pozwolenie na budowę/zgody właścicieli na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane		
5	
Decyzja pozwolenie na budowę /zezwolenie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych 	+ 
Gmina		
6	
Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących
realizacji zadania
	+
Gmina , Województwo	Lipiec 2010 r.
	
7	
Przygotowanie SIWZ
	+
Gmina 	Lipiec 2010 r.	
8	
Przeprowadzenie postępowania przetargowego
	+
Gmina 	Lipiec/Sierpień 2010 r.	
9	
Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą
	+
Gmina 	Sierpień 2010 r.	
10	
Zakończenie i odbiór zadania
	+
Gmina 	Listopad 2010 r.	

11
	Przekazanie środków finansowych	-
 Województwo	W transzach nie później niż do grudnia 2010 r.