Załącznik 
                                                                 do Uchwały nr3059/424/III/2010
z dnia09.11.2010r.
							        Zarządu Województwa Śląskiego                                              

Aneks nr 1

do umowy dotacji nr 416/ZD/2010 z dnia 01.03.2010 roku 
zawarty w dniu ....................................pomiędzy:

Województwem Śląskim
reprezentowanym przez:
1.	………………………………………………………………………………………
2.	………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Województwem

a
Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach 
wpisanym do rejestru sądowego pod numerem KRS:  0000096116
reprezentowanym przez:
Dyrektora  – Włodzimierza Migacza
zwanym dalej Zakładem

Strony zgodnie postanawiają o następującej treści:

§ 1
Dokonuje się zmiany umowy dotacji nr 416/ZD/2010 z dnia 01.03.2010 roku w następujący sposób:

1)	Dokonuje się zmiany § 1 ust. 1 umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: „Województwo zobowiązuje się przekazać Zakładowi dotację celową w kwocie         20 202 853,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy złote) z przeznaczeniem na dofinansowanie  zadania pn. „Rozbudowa kompleksu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa”, zgodnie z Uchwałą Sejmiku           nr III/58/26/2010 z dnia 20 października 2010 roku. Środki finansowe w ramach dotacji przekazywane będą do Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach                       w następujących wysokościach i latach:
kwota 4 108 526,00 zł w 2010 roku, 
kwota 12 594 000,00 zł w 2011 roku,
kwota 3 500 327,00  zł w 2012 roku”.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy dotacji                  nr 416/ZD/2010 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego Aneksu. 

3) Dokonuje się zmiany § 3 ust. 2 umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 
„Środki finansowe określone w §1 przekazywane będą na rachunek bankowy Zakładu 
na podstawie wniosków częściowych oraz końcowego składanych przez Zakład, zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2.
Przekazanie środków finansowych w ramach dotacji nastąpi na podstawie dokumentów finansowych (faktur), wystawionych po zawarciu umowy:
- dla części dotacji w kwocie 4 108 526,00 zł, przedłożonych do realizacji do                   15.12.2010 roku,
- dla części dotacji w kwocie 12 594 000,00  zł, przedłożonych do realizacji do                 15.12.2011 roku, 
- dla części dotacji w kwocie 3 500 327,00 zł, przedłożonych do realizacji do                   15.12.2012 roku”. 

4) Dokonuje się zmiany § 3 ust. 7 umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 
„Wniosek końcowy Zakład zobowiązany jest przedstawić Województwu w następujących terminach: 
- do 15 grudnia 2010 roku, dla części dotacji w kwocie  4 108 526,00 zł, 
- do 15 grudnia 2011 roku, dla części dotacji w kwocie 12 594 000,00 zł, 
- do 15 grudnia 2012 roku, dla części dotacji  w kwocie  3 500 327,00 zł ”. 

5) Dokonuje się zmiany § 3 ust. 10 umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 
„W terminie 7 dni od daty otrzymania środków finansowych Zakład przekaże Województwu bankowe potwierdzenie przekazania środków finansowych na konto dostawcy (wykonawcy). Przekazanie środków finansowych na konto dostawcy musi nastąpić nie później niż do:
- 31 grudnia 2010 roku, dla dotacji w kwocie  4 108 526,00 zł, 
- 31 grudnia 2011 roku, dla dotacji w kwocie 12 594 000,00 zł, 
- 31 grudnia 2012 roku, dla dotacji u w kwocie 3 500 327,00 zł ”.

6) Dokonuje się zmiany § 3 ust. 11 umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 
„Zakład zobowiązany jest do przekazania Województwu comiesięcznego raportu 
z wykorzystania dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy oraz kwartalnej informacji opisowej     o przebiegu realizacji zadania. Sprawozdanie za ostatni kwartał należy złożyć do: 
- 31 grudnia 2010 roku, dla dotacji w kwocie 4 108 526,00 zł, 
- 31 grudnia 2011 roku, dla dotacji w kwocie  12 594 000,00 zł, 
- 31 grudnia 2012 roku, dla dotacji w kwocie 3 500 327,00 zł ”.

7) Dokonuje się zmiany § 4 ust. 1 umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 
„Zakład traci prawo do dotacji (w całości lub w części) w przypadku nie złożenia wniosku końcowego w terminie do: 
- do 15 grudnia 2010 roku, dla części dotacji w kwocie   4 108 526,00 zł, 
- do 15 grudnia 2011 roku, dla części dotacji w kwocie 12 594 000,00 zł, 
- do 15 grudnia 2012 roku, dla części dotacji w kwocie 3 500 327,00 zł ”.

8) Dokonuje się zmiany § 4 ust. 4 umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 
„W przypadku stwierdzania, że dotacja wykorzystana została niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Zakład zobowiązany jest do jej zwrotu wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych”.

9) Dokonuje się zmiany § 4 ust. 5 umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 
„Wzrost wartości inwestycji ponad wartość określoną w umowie nie będzie przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Zakładu wobec Województwa”. 

10) w § 4  skreśla się ust. 6.

§ 2
Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

§ 3
Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Zakładu, a dwa dla Województwa.

           Zakład				                                Województwo Śląskie