Załącznik do Uchwały nr 2907/422/III/2010
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 28.10.2010

Aneks nr 1 
z dnia …………..
do Porozumienia z dnia 30.09.2010 r.  powierzającego Gminie Świerklaniec prowadzenia zadania p.n.: „Projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 911 w miejscowości Orzech” zawarty 

pomiędzy :
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:
Zbyszka Zaborowskiego						Wicemarszałka Województwa Śląskiego
Piotra Spyry							Członka Zarządu Województwa Śląskiego
a
Gminą Świerklaniec z siedzibą w Świerklańcu, przy ul. Młyńskiej 3 reprezentowaną przez Wójta Adama Barona.
§ 1
Na podstawie § 4 pkt. 9 i § 9 Porozumienia z dnia 30.09.2010 r.  strony postanawiają zmienić brzmienie: 
1.	§ 1 pkt. 6 na następujące: „Termin zakończenia realizacji zadania określonego w pkt 1 planowany jest do 
30 września 2011 r.”,
2.	§ 2 pkt. 3 na następujące: „Gmina Świerklaniec zabezpieczy w budżecie na 2011 r. środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 20.000 zł.”,
3.	§ 2 pkt. 5 na następujące: „Województwo Śląskie zabezpieczy w budżecie na 2011 r. środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 60.000 zł.”,
4.	§ 8 pkt. 1 na następujące: „Porozumienie zawiera się na okres do 31 października 2011 r.”.
§ 2
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 
§ 3
Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.
§ 4
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
§ 5
Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Województwo	Śląskie									Gmina Świerklaniec
						
  Załącznik do 
Aneksu z dnia………………..
do Porozumienia z dnia 30.09.2010 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: PROJEKT POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA ODCINKU DW 911 W MIEJSCOWOŚCI ORZECH 

Lp.	Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania	Kto wykonuje	Planowany termin realizacji	
		Jest +	Brak -		
1	
Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania
	_

Gmina , Województwo	Październik/
Listopad    
 2010 r. 	
2	
Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących
realizacji zadania
	
+
Gmina , Województwo 		
3	
Przygotowanie SIWZ
	_

Gmina  	Listopad/
Grudzień                 2010 r. 	
4	
Przeprowadzenie postępowania przetargowego
	_

Gmina	Grudzień/
Styczeń                 2011 r.	
5	
Podpisanie umowy z  wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą
	_

Gmina	Styczeń 
2011 r.	
6	
Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach  i odbiór zadania
	_

Gmina	Wrzesień
2011r . 	
7	
Przekazanie środków finansowych
	_
Województwo
	Nie później niż do 31 października 2011 r.	
8	
Decyzja pozwolenie na budowę /zezwolenie na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych 
	_

Gmina	2011 r.