Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu 
Województwa Śląskiego 
Nr 2227/406/III/2010 
z dnia 03.09.2010 roku

Harmonogram prac nad Studium Rozwoju Systemu Transportu Publicznego Województwa Śląskiego
Lp.	Działania	Ramowy planowany termin realizacji	
1	Decyzja Zarządu Województwa o przystąpieniu do prac nad koncepcją rozwoju transportu publicznego województwa śląskiego.	sierpień 2010	
2	Powołanie:
•	Komitetu Sterującego, w składzie:
•	Marszałek Województwa Śląskiego,
•	Członek Zarządu Województwa Śląskiego,
•	Przewodniczący Komisji właściwej ds. Rozwoju 
i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego,
•	przedstawiciel Wojewody Śląskiego,
•	przedstawiciel GZM,
•	przedstawiciele subregionów,
•	przedstawiciel środowiska naukowego;
W składzie Komitetu nie przewiduje się uczestnictwa organizatorów komunikacji publicznej.
•	Konsultantów w ramach określonych dziedzin;  
•	Interdyscyplinarnych zespołów koordynujących pracę nad koncepcją, w skład których weszliby przedstawiciele Samorządu Województwa Śląskiego, przedstawiciele organizatorów komunikacji publicznej oraz zarządców dróg w regionie;
•	Roboczych zespołów tematycznych, składających się ze specjalistów z określonych dziedzin 	Wrzesień 2010 - Listopad 2010	
3	Posiedzenie Komitetu Sterującego, w ramach którego podjęte zostaną decyzje co do kierunku i zakresu analiz realizowanych w I etapie prac.	Październik/Listopad 2010	
4	Wstępne analizy i konsultacje zakresu opracowania Studium.
Analizie poddane zostaną dokumenty i materiały otrzymane od organizatorów komunikacji publicznej oraz ogólnodostępne statystyki. (w tym powiadomienie o rozpoczęciu prac nad strategią partnerów społecznych).	Październik 2010 – Grudzień 2010	
5	Realizacja II etapu prac związana z:
•	przeprowadzeniem diagnozy sytuacji w obszarze transportu publicznego:
•	identyfikacja wielkości istniejących potoków ruchu; 
•	identyfikacja barier integracji transportu publicznego (organizacyjnych, technicznych, infrastrukturalnych, finansowych, mentalnych, innych);
•	opracowaniem prognoz ruchu i przewozów w województwie śląskim do roku 2035, z uwzględnieniem nowych tendencji, szans i wyzwań rozwojowych oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych regionu;
•	weryfikacją istniejących rozwiązań pod kątem optymalizacji świadczonych usług (z punktu widzenia oczekiwań pasażerów, poziomu kosztów funkcjonowania ponoszonych przez organizatorów i przewoźników, samorządy gminne, powiatowe i województwa).
Ten etap prac związany będzie ze zleceniem badań i analiz ekspertom i firmom zewnętrznym, zgodnie z procedurami przewidzianymi w ustawie prawo zamówień publicznych.
Przewidywane prace:
•	opracowanie dokumentacji przetargowej,
•	przeprowadzenie postępowania przetargowego,
•	realizacja umowy przez wykonawców badań i analiz (etapowe przekazywanie wyników prac).	Styczeń 2011 – Marzec 2012	
6	Realizacja III i IV Etapu prac związana z:
•	opracowaniem priorytetów rozwoju transportu publicznego w województwie śląskim;
•	sporządzeniem listy głównych projektów, w tym infrastrukturalnych o szczególnym znaczeniu dla osiągnięcia zidentyfikowanych priorytetów rozwojowych wraz z prognozą finansową środków publicznych służących realizacji projektów;
•	stworzeniem systemu wdrażania i monitoringu koncepcji.
W zakresie realizacji III i IV etapu prac przewiduje się organizację spotkań i warsztatów z udziałem zespołów interdyscyplinarnych, roboczych zespołów tematycznych oraz komitetu sterującego.	Kwiecień 2012 – Październik 2012	
7	Opracowanie projektu Studium Rozwoju Systemu Transportu Publicznego Województwa Śląskiego.	Listopad 2012 – Luty 2013	
8	Opracowanie Prognozy oddziaływanie na środowisko.	Kwiecień 2012 – Luty 2013	
9	Opiniowanie projektu Studium Rozwoju Systemu Transportu Publicznego Województwa Śląskiego.	Marzec 2013 – Maj 2013	
10	Konsultacje społeczne projektu Studium Rozwoju Systemu Transportu Publicznego Województwa Śląskiego, w ramach których zorganizowana zostanie konferencja przedstawiająca opracowany projekt Studium oraz podsumowująca zrealizowane prace.	Marzec 2013 – Maj 2013	
11	Przyjęcie Studium Rozwoju Systemu Transportu Publicznego Województwa Śląskiego przez Sejmik Województwa Śląskiego.	Czerwiec 2013