Uchwała nr 1663/389/III/2010
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 6.07.2010 r.
w sprawie
zatwierdzenia zaktualizowanego  harmonogramu  rzeczowo – finansowego  oraz zawarcia aneksu  do umowy  dotacji dla zadania pn. „Budowa obiektu sportowego w Mazańcowicach przy Gimnazjum i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012”
na podstawie art.41 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz.1590 z późn. zm.)
Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1
1.	Zatwierdza się zaktualizowany harmonogram  rzeczowo–finansowy  zadania pn. „Budowa obiektu sportowego w Mazańcowicach przy Gimnazjum i Zespole Szkolno – Przedszkolnym      w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2.	Zawiera się aneks nr 5 do umowy dotacji nr 2238/IW/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. dla zadania jak w pkt 1, przedłużający termin  jego zakończenia  ze środków własnych Gminy Jasienica              do dnia 15 sierpnia  2010 r.
Projekt aneksu nr 5  stanowi  załącznik  nr 2 do  niniejszej  uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
1.	Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa		…………………..

2.	Zbyszek Zaborowski – Wicemarszałek Województwa	…………………..

3.	Adam Stach – Wicemarszałek Województwa		…………………..

4.	Mariusz Kleszczewski – Członek Zarządu			…………………..

5.	Piotr Spyra – Członek Zarządu				…………………..