Uchwała nr 1285/380/III/2010  
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 2.06.2010 r.

	w sprawie

zatwierdzenia zaktualizowanego  harmonogramu  rzeczowo – finansowego  oraz zawarcia aneksu  do umowy dotacji dla zadania pn. „Budowa obiektu sportowego w Mazańcowicach przy Gimnazjum i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012”

na podstawie art.41 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz.U.  z 2001 r. Nr 142 poz.1590 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1
1.	Zatwierdza się zaktualizowany harmonogram rzeczowo–finansowy zadania pn. „Budowa obiektu sportowego w Mazańcowicach przy Gimnazjum i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2.	Zawiera się aneks nr 4 do umowy dotacji nr 2238/IW/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. dla zadania jak w pkt 1, przedłużający termin  jego zakończenia  ze środków własnych Gminy Jasienica do dnia 30 czerwca  2010 r.

Projekt aneksu nr 4  stanowi  załącznik  nr 2 do  niniejszej  uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Marszałkowi Województwa Śląskiego. 

	§ 3
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
		1.	Bogusław  Śmigielski – Marszałek Województwa			................................
		2.	Zbyszek  Zaborowski – Wicemarszałek Województwa		................................
		3.	Adam Stach – Wicemarszałek Województwa			................................
		4.	Mariusz  Kleszczewski – Członek Zarządu				................................
		5.	Piotr  Spyra – Członek Zarządu					................................