Załącznik do uchwały nr 552/358/III/2010
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 16.03. 2010 r.

Harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie opracowania Programu prac urządzeniowo - rolnych dla Gminy Żarnowiec przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie 
(powierzchnia 12480 ha)

Etap	Treść zadania	Termin zakończenia etapu	Szacunkowe określenie zaawansowania prac	Wartość prac	
I	1. Nawiązanie współpracy z urzędem gminy i sołectwami.
2. Pozyskanie danych źródłowych i inne prace przygotowawcze:
- przygotowanie bazy informatycznej, jako podstawy do programowania  
  prac urządzeniowo - rolnych w zakresie danych:
•	ewidencji gruntów,
•	planu zagospodarowania przestrzennego,
•	granicy rolno-leśnej,
•	zasobów, wydobycia złóż i kopalin naturalnych
•	spisu rolnego,
•	urzędu statystycznego,
•	melioracji podstawowych i szczegółowych,
- innych istniejących opracowań.	31.05.2010 r.	ok. 20%	50 868 zł	
II	1. Inwentaryzacja stanu istniejącego:
- inwentaryzacja terenowa w zakresie:
•	lasów,
•	terenów zdewastowanych i zaniedbanych,
•	zadrzewień i zakrzewień,
•	dróg,
•	rowów,
•	terenów podmokłych i oczek wodnych
- wykonanie dokumentacji fotograficznej.	16.08.2010 r.	ok. 50%	127 171 zł	
III	1. Analiza stanu istniejącego:
- analiza stanu istniejącego na podstawie pozyskanych materiałów
  źródłowych i inwentaryzacji terenowej,
- opracowanie wniosków z analizy stanu istniejącego.
2. Konsultacje społeczne.
3. Ustalenia programu prac urządzeniowo- rolnych:
- ustalenie rodzaju i zakresu niezbędnych zabiegów urządzeniowo- 
  rolnych,
- ustalenie kolejności wykonywania zabiegów urządzeniowo – rolnych.
4. Opracowanie projektu „Programu prac urządzeniowo –rolnych”:
- opracowanie wniosków na podstawie analizy stanu istniejącego 
  i ustaleń programu prac urządzeniowo – rolnych,
- opracowanie map przeglądowych w formie cyfrowej i drukowanej 
  w zakresie:
•	gospodarki wodnej,
•	sieci drogowej,
•	zalesienia i zadrzewienia,
•	zainwestowania terenu,
•	poprawy warunków wodnych i gospodarki wodnej,
•	planowanej modernizacji sieci dróg transportu rolnego,
•	krajobrazu przyrodniczego oraz jego ochrony,
•	planowanego wyłączenia użytków rolnych z produkcji rolnej,
•	programu prac urządzeniowo – rolnych.
5. Konsultacja społeczna „Programu prac urządzeniowo – rolnych”.
6. Opracowanie treści „Programu prac urządzeniowo- rolnych” dla 
 Gminy Żarnowiec zgodnie z „Założeniami do opracowania programu 
 prac urządzeniowo – rolnych dla Województwa Śląskiego”.	15.11.2010 r.	ok. 30%	76 303 zł	
Wartość opracowania	254 342 zł