Uchwała nr 32/338/III/2010
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 07 stycznia 2010 roku         

w sprawie:

podpisania Aneksu Nr 2 do umowy Nr 1517/ZD/2008 z dnia 20 sierpnia 2008r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Zakładem Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych Sp z.o.o 
w Katowicach 

Na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1590 z późn. zm.) w związku z art.35 ust.1 pkt 5 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 187 poz.1940 z późn.zm.)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§1

Podpisuje się Aneks Nr 2 do umowy Nr 1517/ZD/2008 z dnia 20 sierpnia 2008r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Zakładem Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych Sp z.o.o 
w Katowicach  – o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się  Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
	
1. Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa	            ................................
2. Zbyszek Zaborowski – Wicemarszałek Województwa	            ................................
3. Adam Stach  – Wicemarszałek  Województwa	                        ................................
4. Mariusz Kleszczewski  - Członek Zarządu		            ................................
5. Piotr Spyra - Członek Zarządu			                        ................................

ANEKS NR 2
z dnia                                                2010r.
do umowy NR 1517/ZD/2008 z dnia 20 sierpnia 2008r.

zawartej pomiędzy:

I.	WOJEWÓDZTWEM ŚLĄSKIM, zwanym dalej „Województwem”, w imieniu którego działają:
1. Mariusz Kleszczewski – Członek Zarządu Województwa Śląskiego
2. Piotr Spyra                   –  Członek Zarządu Województwa Śląskiego

i 

II.	podmiotem: „Zakład Usług Rehabilitacyjno - Socjalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ” w Katowicach, 
z siedzibą: ul. Sokolska 3, 40-084 Katowice, NIP: 634-23-24-513, zwanym dalej „Wnioskodawcą” – w imieniu którego działa:

Andrzej Wilczyński  – Prezes Zarządu

Strony ustalają:

§1
W umowie Nr 1517/ZD/2008 z dnia 20 sierpnia 2008r.  wprowadza się następujące zmiany:

1.	w §1 punkt 2) „ZAŁĄCZNIK NR 1A” zastępuje się: „ZAŁĄCZNIKIEM NR 1B”, załączonym do niniejszego aneksu.
2.   w §3 lit. c kwotę: „1.153.094,37 zł” zastępuje się kwotą: „1.272.740,11 zł.”
3.   w §3 lit. d kwotę: „853.094,37 zł” zastępuje się kwotą: „972.740,11 zł.”.

§2
Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie.

§3
Niniejszy aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 
ze stron.

Za Województwo					Za Wnioskodawcę

ZAŁĄCZNIK NR 1B
do
UMOWY NR 1517/ZD/2008
z dnia 20 sierpnia 2008r.

lp	zakres robót z projektu: "Dobudowa windy zewnętrznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia do budynku. Przebudowa budynku w 5 kondygnacjach z pokoi biurowych za zakład rehabilitacji leczniczej tj.: gabinety fizykoterapii, hydroterapii, masażu leczniczego, salę rehabilitacyjną, gabinety lekarskie, zabiegowe i pomieszczenia socjalno-higieniczne w obiekcie: Zakład Usług Rehabilitacyjno – Socjalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	szacunkowy termin
wykonania robót	źródła finansowania	
			środki własne lub pozyskane
z innych źródeł	środki
z PFRON	
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	09.10.2008r. – 30.10.2008r.	55.408,48 zł.	0,00 zł.	
2	Stan zerowy	09.10.2008-25.03.2008	  14.712,71 zł.	0,00 zł.	
3	Przebudowa wejścia budynku (schody, montaż okien, balustrady, drzwi)	09.10.2008-23.11.2008	22,59 zł.	36.600,00 zł.	
4	Dobudowa szybu windy zewnętrznej (zakup, montaż windy)	30.10.2008-10.04.2008	153.305,91 zł.	         80.000,00 zł.	
5	Konstrukcja budynku (ścianki)	30.10.2008.17.04.2008	78.613,95 zł.	0,00 zł.	
6	Zadaszenie wejścia do budynku	15.11.2008-20.07.2008	4.730,04 zł.	0,00 zł.	
7	Roboty demontażowe wod – kan i c.o.	09.10.2008-15.02.2009	6.121,85 zł.	0,00 zł.	
8	Zakup i instalacja wentylacji (przewody wewnętrzne z blachy stalowej i aluminiowej, wentylatory dchowe)	30.11.2008-31.08.2009	43.147,63 zł.	0,00 zł.	
9	Zakup i połozenie nowej instalacji wod-kan.                    i c.o.	09.10.2008-15.09.2009	171.759,83 zł.	0,00 zł.	
10	Zakup i montaż stalarki okiennej i drzwiowej oraz parapety wewnętrzne	09.10.2008-30.06.2009	106.382,18 zł.	83.400,00 zł.	
11	Przebudowa 5 kondygnacji budynku, roboty wykończeniowe i instalacyjne	09.10.2008-15.09.2009	198.937,33 zł.	100.000,00 zł.	
12	Elewacja i docieplenie windy	10.04.2009-30.09.2009	18.294,94 zł.	0,00 zł.	
13	Rpzebranie starych strop.ow na 2-ch kondygnacjach, roboty dodatkowe	30.10.2008-30.01.2009	32.903,47 zł.	0,00 zł.	
14	Dobudowa nowych stropów na 2-ch kondygnacjach	06.02.2009-30.03.2009	88.399,20 zł.	0,00 zł.	
	                                                koszty robót ogółem	1.272.740,11 zł.	                                 972.740,11 zł.
	                              300.000,00 zł.

 Za Województwo					                                              Za Wnioskodawcę