Załącznik nr 1
								do Uchwały Nr …../…..../III/2009 
Zarządu Województwa Śląskiego 
z dnia  …………………………..

Aneks Nr 2

do umowy Nr 2191/KL/2009 z dnia 06 lipca 2009 r.

w sprawie realizacji zadania pn.:

Osuszenie ścian, wymiana elementów więźby, wymiana pokrycia dachowego, odeskowania ścian osłonowych nawy i wieży, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji w kościele filialnym p.w. Św Mikołaja w Przyrowie

zawarty dnia                                                   2009 r. pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, zwanym dalej „Województwem” reprezentowanym przez:
1.	Zbyszka Zaborowskiego – Wicemarszałka Województwa Śląskiego
2.	Gabrielę Gros - p.o. Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
a
Rzymskokatolicką Parafią p.w. św. Doroty w Przyrowie, z siedzibą w Przyrowie (42-248) ul. Częstochowska nr 1, zwaną dalej „Beneficjentem”, 
reprezentowaną przez:
Tomasza Wronę – proboszcza parafii

§ 1.

1.	Zmienia się § 3 ust. 1 umowy i przyjmuje on nowe następujące brzmienie:
Termin wykonania zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2009 roku.
2.	Zmienia się § 9 ust. 2 umowy i przyjmuje on nowe następujące brzmienie:
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać złożone przez Beneficjenta na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 5 do uchwały, o której mowa w ust. 1, w terminie do dnia 15.12.2009 roku. 
3.	Zmienia się § 10 umowy i przyjmuje on nowe następujące brzmienie:
1.	Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany wykorzystać w terminie 15 dni od dnia wskazanego w § 3 ust. 1 jako termin końcowy wykonania zadania, tj. do dnia 15.12.2009 roku. 
2.	Środki finansowe niewykorzystanej części dotacji Beneficjent jest zobowiązany zwrócić wraz z odsetkami w terminie 15 dni od dnia wskazanego w § 3 ust. 1 jako termin końcowy wykonania zadania, tj. do dnia 15.12.2009 roku, na rachunek bankowy wskazany przez Województwo.

§ 2
Zapisy umowy nie objęte aneksem pozostają bez zmian.

§ 3
Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - trzech dla Województwa i jednego dla Beneficjenta.

	Beneficjent:							Województwo: