Uchwała nr 1385/276/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia  04 czerwca 2009 roku         

w sprawie:

podpisania Aneksu Nr 1 do umowy NR 1517/ZD/2008 z dnia 20 sierpnia 2008r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i „Zakładem Usług Rehabilitacyjno - Socjalnych Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością”  w Katowicach

Na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1590 z późn. zm.) w związku z art.35 ust.1 pkt 5 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 187 poz.1940 z późn.zm.)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§1

Podpisuje się Aneks Nr 1 do umowy Nr 1517/ZD/2008 z dnia 20 sierpnia 2008r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i „Zakładem Usług Rehabilitacyjno - Socjalnych Spółka
 z ograniczoną odpowiedzialnością”  w Katowicach – o treści zgodnej z załącznikiem 
załączonym do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się  Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa	            ................................
2. Zbyszek Zaborowski – Wicemarszałek Województwa	            ................................
3. Adam Stach  – Wicemarszałek  Województwa	                        ................................
4. Mariusz Kleszczewski  - Członek Zarządu		            ................................
5. Piotr Spyra - Członek Zarządu			                        ................................

          Załącznik do Uchwały nr 1385/276/III/2009
  Zarządu Województwa Śląskiego 
  z dnia 04 czerwca 2009r.
ANEKS NR 1
z dnia                                            2009r.
do umowy NR 1517/ZD/2008 z dnia 20 sierpnia 2008r.

zawartej pomiędzy:

I.	WOJEWÓDZTWEM ŚLĄSKIM, zwanym dalej „Województwem”, w imieniu którego działają:
1. Mariusz Kleszczewski – Członek Zarządu Województwa Śląskiego
2. Piotr Spyra                   –  Członek Zarządu Województwa Śląskiego

i 

II.	podmiotem: „Zakład Usług Rehabilitacyjno - Socjalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ” w Katowicach,  z siedzibą: ul. Sokolska 3, 40-084 Katowice, NIP: 634-23-24-513, zwanym dalej „Wnioskodawcą” – w imieniu którego działa:

Andrzej Wilczyński  – Prezes Zarządu

Strony ustalają:
§1
W UMOWIE NR 1517/ZD/2008 z dnia 20 sierpnia 2008r.  wprowadza się następujące zmiany:
1)	w §1 punkt 2 „ZAŁĄCZNIK NR 1” zastępuje się: „ZAŁĄCZNIKIEM NR 1A”,załączonym do niniejszego aneksu.
2)	§3 otrzymuje nowe brzmienie:
      „Wnioskodawca oświadcza, że:
a)	realizacja zadania rozpoczęta zostanie: 09 października 2008r.,
b)	przewiduje zakończenie zadania w terminie: 15 września 2009r.,
c)	przewidywany całkowity koszt realizacji robót budowlanych w ramach realizacji zadania wynosi: 1.153.094,37 zł.,
d)	posiada środki własne lub pozyskane z innych źródeł na sfinansowanie realizacji zadań w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w kwocie: 853.094,37 zł.,
e)	spełnia warunki do otrzymania dofinansowania, wynikające z przepisów, o których mowa w §10”.
3) w §5 punkt 1 datę: „30 czerwiec 2009r.” zastępuje się datą: „30 wrzesień 2009r.”
  §2
Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie.
                                                                         §3
Niniejszy aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Za Województwo					Za Wnioskodawcę
ZAŁĄCZNIK NR 1A
do
UMOWY NR 1517/ZD/2008

z dnia 20 sierpnia 2008r.

lp	zakres robót z projektu: „Dobudowa windy zewnętrznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia do budynku. Przebudowa budynku w 5 kondygnacjach z pokoi biurowych na zakład rehabilitacji leczniczej tj.: gabinety fizykoterapii, hydroterapii, masażu leczniczego, salę rehabilitacyjną, gabinety lekarskie, zabiegowe i pomieszczenia socjalno-higieniczne w obiekcie: „Zakład Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością”,
ul. Sokolska 3, 40-084 Katowice”	szacunkowy termin wykonania robót	źródła finansowania	
			środki własne lub pozyskane
z innych źródeł	środki
z PFRON na 2008r.	
1.	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	09.10.2008r. – 30.10.2008r.	70.760,00 zł	0,00 zł	
2.	Stan zerowy	09.10.2008r. – 25.03.2009r.	64.660,00 zł	0,00 zł	
3.	Przebudowa wejścia budynku (schody, montaż okien, balustrady, drzwi)	09.10.2008r. – 23.11.2008r.	0,00 zł	36.600,00 zł	
4.	Dobudowa szybu windy zewnętrznej (zakup, montaż windy)	30.10.2008.r – 10.04.2009r.	146.800,00 zł	80.000,00 zł	
5.	Konstrukcja budynku (ścianki)	30.10.2008r. – 17.04.2009r.	36.600,00 zł 	0,00 zł	
6.	Zadaszenie wejścia do budynku	15.11.2008r. – 20.07.2009r.	36.600,00 zł	0,00 zł	
7.	Roboty demontażowe wod-kan i c.o.	09.10.2008r. – 15.02.2009r.	8.540,00 zł	0,00 zł	
8.	Zakup i instalacja wentylacji (przewody wewnętrzne z blachy stalowej i aluminiowej, wentylatory dachowe)	30.11.2008r. – 31.08.2009r.	67.100,00 zł	0,00 zł	
9.	Zakup i położenie nowej instalacji 
wod-kan i c.o.	09.10.2008r. – 15.09.2009r.	102.480,00 zł	0,00 zł	
10.	Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapety wewnętrzne	09.10.2008r. – 30.06.2009r.	73.980,00 zł	83.400,00 zł	
11.	Przebudowa 5 kondygnacji budynku, roboty wykończeniowe i instalacyjne	09.10.2008r. – 15.09.2009r.	112.280,00 zł	100.000,00 zł	
12.	Elewacja i docieplenie windy	10.04.2009r. – 30.09.2009r.	14.640,00 zł	0,00 zł	
13.	Rozebranie starych stropów na 2-ch kondygnacjach	30.10.2008r. – 30.01.2009r.	30.251,17 zł	0,00 zł	
14.	Dobudowa nowych stropów na 2-ch kondygnacjach	06.02.2009r. – 30.03.2009r.	88.399,20 zł	0,00 zł	
	koszty robót ogółem	1.153.094,30 zł	853.094,37zł	300.000,00 zł	

Za Województwo								Za wnioskodawcę