Uchwała nr 2894/215/III/2008  
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 2.12.2008 r.

	w  sprawie

1. Zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego dla zadania pn. Moje boisko Orlik 2012 w Lyskach,
2. Zawarcia aneksu nr 1 do umowy zawartej z Gminą Lyski  o dofinansowanie środkami z budżetu Województwa Śląskiego zadania jak w pkt 1.

na podstawie art.41 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. nr 142/2001, poz.1590 z późniejszymi zmianami)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1.
1.	Zatwierdzić zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy dla zadania pn. Moje boisko Orlik 2012 w Lyskach,
2.	Zawrzeć aneks nr 1, dotyczący aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz przesunięcia terminu zakończenia do dnia 30 kwietnia 2009 r. do umowy                                   nr 2072/IW/2008 z dnia 23 września 2008 r. zawartej z Gminą Lyski o dofinansowanie środkami z budżetu Województwa Śląskiego zadania jak w pkt 1, współfinansowanego                   w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008.

Projekt aneksu nr 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Marszałkowi Województwa Śląskiego. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Bogusław ŚMIGIELSKI - Marszałek Województwa        		....................
2. Zbyszek ZABOROWSKI - Wicemarszałek Województwa     	....................   	
3. Adam STACH - Wicemarszałek Województwa    			....................
4.Mariusz KLESZCZEWSKI - Członek Zarządu              		....................
5. Piotr SPYRA - Członek Zarządu                    				....................