Uchwała nr 2888/215/III/2008  
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 2.12.2008 r.
	w sprawie

1. Zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego dla zadania pn. Budowa kompleksu sportowego w Dzielnicy Sikorskiego w Żorach,
2. Zawarcia aneksu nr 1 do umowy zawartej z Gminą Żory o dofinansowanie środkami z budżetu Województwa Śląskiego zadania jak w pkt 1.

na podstawie art.41 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. nr 142/2001, poz.1590 z późniejszymi zmianami)
Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1.

1.	Zatwierdzić zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy dla zadania pn. Budowa kompleksu sportowego w Dzielnicy Sikorskiego w Żorach,

2.	Zawrzeć aneks nr 1, dotyczący aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz przesunięcia terminu zakończenia do dnia 30 kwietnia 2009 r., do umowy                                   nr 2123/IW/2008 z dnia 29 września 2008, zawartej z Gminą Żory o dofinansowanie środkami z budżetu Województwa Śląskiego zadania jak w pkt 1, współfinansowanego   w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008.

	Projekt aneksu nr 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Marszałkowi Województwa Śląskiego. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
1. Bogusław ŚMIGIELSKI - Marszałek Województwa        		....................
2. Zbyszek ZABOROWSKI - Wicemarszałek Województwa     	....................   	
3. Adam STACH - Wicemarszałek Województwa    			....................
4.Mariusz KLESZCZEWSKI - Członek Zarządu              		....................
5. Piotr SPYRA - Członek Zarządu                    				....................