Załącznik do Uchwały  nr 2486/205/III/2008
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 21.10.2008 

ANEKS nr 3
do Porozumienia nr 89/KT/2007 z dnia 13.08.2007r.
zawarty w dniu...............................2008r.
pomiędzy:
Województwem Śląskim,  z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:
Zbyszka Zaborowskiego                                                           Wicemarszałka Województwa Śląskiego
Piotra Spyry	                                                                     Członka Zarządu Województwa Śląskiego
a
Gminą Rudnik, z siedzibą w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1 reprezentowaną przez Wójta Alojzego Pieruszka.

§ 1
Na podstawie § 6 Porozumienia nr 89/KT/2007 z dnia 13.08.2007r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 29.10.2007 r.  i Aneksem nr 2 z dnia 19.11.2007 r.  strony postanawiają zmienić brzmienie:

1.	§ 1 pkt.2 na następujące: "Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt. 1 obejmuje budowę jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 (ul. Powstańców Śl.) w miejscowości Grzegorzowice odcinek od ul. Odrzańskiej do przedszkola po stronie wschodniej, odcinek od szkoły podstawowej do ul. Młyńskiej po stronie północnej oraz opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia z umocnieniem skarpy wraz z  wymianą części nawierzchni na łuku w okolicy przedszkola po stronie zachodniej odcinka od ul. Odrzańskiej do przedszkola."
2.	§ 1 pkt. 3 na następujące: "Gmina oświadcza, że jest w posiadaniu pozwolenia na budowę dotyczącego budowy obydwu odcinków chodnika oraz że uzyska pozwolenie na budowę (dokona zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych) dla zamierzenia budowlanego polegającego na wykonaniu odwodnienia z umocnieniem skarpy wraz z  wymianą części nawierzchni na łuku w okolicy przedszkola po stronie zachodniej odcinka od ul. Odrzańskiej do przedszkola. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone na wniosek Gminy.
3.	§ 2 pkt. 1 na następujące: "Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 1.148.000 zł (jeden milion sto  czterdzieści osiem tysięcy złotych)."
4.	§ 2 pkt. 3 na następujące: "Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Rudnik otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów w pięciu transzach.
a.	I transza w wysokości do 300.000 zł – po wykonaniu i odebraniu części robót budowlanych,
b.	II transza w wysokości do 565.166 zł - po wykonaniu i odebraniu części robót budowlanych,
c.	III transza w wysokości do 152.834 zł - po wykonaniu i odebraniu części robót budowlanych,
d.	IV transza w wysokości do 20.000 zł – po opracowaniu i odebraniu projektu,
e.	V transza w pozostałej wysokości. – po odbiorze końcowym zadania. "
5.	§ 2 pkt. 5 na następujące: „Wystawienie wniosków dotyczących robot budowlanych nastąpi po odbiorach częściowych lub końcowym zadania dokonanych przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wystawienie wniosku dotyczącego opracowania projektu nastąpi po uzyskaniu pozytywnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach nt. projektu. 
6.	§ 5 pkt. 2 na następujące: "Porozumienie zawiera się na okres do 30 października 2009r."

§ 2
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3
Niniejszy aneks stanowi integralna część przedmiotowego porozumienia.
§ 4
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5
Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie                                                                                  Gmina Rudnik