Załącznik do Uchwały nr 2455/205/III/2008
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 21.10.2008

ANEKS NR 2
DO  POROZUMIENIA NR 51/KT/2007 z dnia 3.07.2007r. 
zawarty w dniu   ..............................
pomiędzy :
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:
Zbyszka Zaborowskiego	-			Wicemarszałka Województwa Śląskiego
Piotra Spyry 			-			Członka Zarządu Województwa Śląskiego
a
Miastem Żywiec z siedzibą w Żywcu Rynek 2 reprezentowanym przez Burmistrza Antoniego Szlagora z kontrasygnatą Skarbnika  Miasta Żywiec – Bogusławy Gardaś.

§ 1
Na podstawie § 6 Porozumienia nr 51/KT/2007 z dnia 03.07.2007 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 27.12.2007 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:
1.	§ 1 pkt. 1 na następujące: „Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Żywiec prowadzenia zadania p.n.: „Aktualizacja dokumentacji i przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową w Żywcu” realizowanego w latach 2007-2009”.
2.	§ 2 pkt. 1 na następujące: „Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 3.800.000 zł (trzy miliony osiemset tysięcy złotych)”.
3.	§ 2 pkt.3 na następujące:
„pkt. 3 a: „Na realizację zadania objętego porozumieniem Miasto Żywiec udzieli w 2009 r. pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w wysokości 380.000 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).
pkt. 3 b: „Na realizację zadania objętego porozumieniem Miasto Żywiec otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów w czterech transzach:
·	w wysokości do 100.000 zł za aktualizację projektu, po odbiorze końcowym zaktualizowanej dokumentacji,
·	w wysokości do 1.000.000 zł, po wykonaniu i odebraniu części przebudowy skrzyżowania, 
·	w wysokości do 2.000.000 zł, po wykonaniu i odebraniu części przebudowy skrzyżowania, w tym środki w wysokości 380.000 zł stanowiące pomoc Miasta,
·	w pozostałej wysokości po zakończeniu zadania i dokonaniu odbioru końcowego”.
4.	§ 2 pkt. 5 na następujące: „Wystawienie wniosków nastąpi po odbiorze końcowym zaktualizowanego projektu dokonanym po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz odbiorach częściowych i końcowym przebudowy dokonanych przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach”. 
5.	§ 2 pkt. 6 na następujące: „Do pisemnych wniosków wymienionych w § 2 pkt 4 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich na temat projektu, protokołu końcowego odbioru projektu, protokołów częściowych i końcowego odbioru przebudowy skrzyżowania oraz rachunków i faktur”.
6.	§ 5 na następujące: ” Porozumienie zawiera się na okres do 15 listopada 2009 r.” 
§ 2
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 
§ 3
Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.
§ 4
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§5
Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo	Śląskie								Miasto Żywiec