Załącznik do Uchwały nr 1151/170/III/2008
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 10.03.2008 r.

ANEKS NR 2
DO  POROZUMIENIA NR 83/KT/2007 z dnia 6.08.2007r. 
zawarty w dniu   ..............................

pomiędzy :
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:
………………………………………………...		Wicemarszałka Województwa Śląskiego
…………………………………………………		Członka Zarządu Województwa Śląskiego
a
Miastem Żywiec z siedzibą w Żywcu Rynek 2 reprezentowanym przez Burmistrza Antoniego Szlagora z kontrasygnatą Skarbnika  Miasta Żywiec – Bogusławy Gardaś.

§ 1
1.	Na podstawie § 6 Porozumienia nr 83/KT/2007 z dnia 06.08.2007 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 27.12.2007 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:
a.	§ 1 pkt. 1 na następujące: „Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Żywiec prowadzenia zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 95 z ul. Piłsudskiego oraz dobudowa odcinka drogi w Żywcu” realizowanego w latach 2007-2009”.
b.	§ 2 pkt. 1 na następujące: „Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 6.750.000 zł (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w tym koszt aktualizacji dokumentacji wraz z elementami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”.
c.	§ 2 pkt. 3 na następujące: „Na realizację zadania objętego porozumieniem Miasto Żywiec otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów :
ü	w 2008 r. wysokości do 200.000 zł,
ü	w 2009 r. w pozostałej wysokości.”
d.	§ 2 pkt. 5 na następujące: „Wystawienie wniosków nastąpi po odbiorze końcowym zaktualizowanego projektu, po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz po odbiorach częściowych i końcowym budowy”.
e.	§ 2 pkt. 6 na następujące: „Do pisemnych wniosków wymienionych w pkt. 4 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołów końcowego odbioru projektu wraz z pozytywną opinią Zarządu Dróg Wojewódzkich nt. projektu,  oraz odbiorów częściowego i końcowego budowy.”
f.	§ 5 na następujące: „Porozumienie zawiera się na okres do 15 listopada 2009 r.”

§ 2
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 3
Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§5
Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo	Śląskie								Miasto Żywiec