ANEKS NR 1
z dnia ___  kwietnia 2007r.
do umowy NR 2129 /ZD/2006 z dnia 24 listopada 2006r.

zawartej pomiędzy:

I. 	WOJEWÓDZTWEM ŚLĄSKIM, zwanym dalej “Województwem”, w imieniu którego działają:
1.	Janusz Moszyński	– Marszałek Województwa Śląskiego
2.	Grzegorz Szpyrka	– Wicemarszałek Województwa Śląskiego

i

II. 	Stowarzyszeniem Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski,
z siedzibą: ul. Wielkopolska 1a, 44-335 Jastrzębie Zdrój, NIP: 633-18-07-461,
zwanym dalej „Wnioskodawcą” – w imieniu którego działają:
1). Tadeusz Brożek - Prezes Zarządu
2). Ewa Domańska - Sekretarz

Strony ustalają:

§1
W UMOWIE NR 2129/ZD/2006 z dnia 24 listopada 2006r. dotychczasową treść 
ZAŁĄCZNIKA NR 1 zmienia się na następującą:

ZAŁĄCZNIK NR 1
do
UMOWY NR 2129/ZD/2006
z dnia 	24 listopada 2006r.

lp	Zakres robót z  projektu:
"Remont budynku Warsztatu
Terapii Zajęciowej
polegający m.in. na termomodernizacji"	szacunkowy termin
wykonania robót	źródła finansowania	
			środki własne lub pozyskane
z innych źródeł	środki
z PFRON	
1	Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej	marzec ÷ maj 2007		46 405,03 zł.	
2	Roboty budowlane kotłowni z montażem wkładu kwasoodpornego	luty ÷ marzec 2007		1 348,58 zł.	
3	Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek	grudzień  2006
 ÷ luty 2007	1 389,67 zł.		
4	Wykonanie kotłowni gazowej c.o. 
z instalacją gazową	grudzień  2006
 ÷ luty 2007	50 110,33 zł.	3 746,39 zł.	
	Koszty robót ogółem:	103 000,00 zł.	51 500,00 zł.	51 500,00 zł.	

§2
Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie.

§3
Niniejszy aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Za Województwo					Za Wnioskodawcę