PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2007r.
ŚLĄSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI
na nieruchomościach zabudowanych przekazanych do zarządzania
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

Lp.	Adres nieruchomości	Skrócony opis
planowanych robót remontowych	Planowany koszt 
netto w zł.	Planowany termin realizacji robót	Cel prowadzonych 
robót remontowych	Uwagi	

1	
Bielsko – Biała 
ul. Stalowa 33 - 41	Tynkowanie nadbudowy budynku nr 33, likwidacja płyt eternitowych z elewacji zachodniej  – naprawa bieżąca	
36.175,35	
Lipiec - Październik	Zapobiegawczy charakter naprawy	

2	
Bielsko – Biała 
ul. Stalowa 33 - 41	Likwidacja płyt eternitowych na elewacjach zachodnich budynków nr 37, 39, 41,                          a następnie ocieplenie tych ścian i malowanie – naprawa bieżąca	Nr 37 - 32.043,67 
Nr 39 - 31.670,81 
Nr 41 - 31.670,81- 
∑ 95.385,29	
Lipiec - Październik	
Zapobiegawczy charakter naprawy		

3	

Bielsko – Biała 
ul. Stalowa 33 - 41	
Wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w budynkach nr 33 – 41 – naprawa główna 
	- Nr 33 : 59.990,11
- Nr 35 : 68.268,78
- Nr 37 : 44.874,86
- Nr 39 : 44.874,86
- Nr 41 : 45.147,89
∑ 263.156,50	

Lipiec - Październik	

Zapobiegawczy charakter naprawy		

4	
Bielsko – Biała 
ul. Stalowa 33 - 41	Likwidacja tymczasowego napowietrznego zasilania w energię elektryczną budynków                             nr 37 i 39– naprawa bieżąca	 
13.259,19	
Lipiec - Październik	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników                  i osób trzecich	
	
	Razem Bielsko – Biała,                   ul. Stalowa 33 – 41		407.976,33				

5	
Bystra Śląska, ul. J. Fałata              i ul. Szczyrkowska	Budynek, ul. Szczyrkowska 73 :
Wymiana okien na klatce schodowej, naprawa schodów i chodnika przed budynkiem, ocieplenie stropu – naprawa bieżąca	
34.730,22	
Lipiec - Październik	
Zapobiegawczy charakter naprawy	

6	

Bystra Śląska, ul. J. Fałata              i ul. Szczyrkowska	Budynek, ul. Szczyrkowska 75 :
Wymiana :
•	pokrycia dachowego nad pizzerią HAWA ( taras ) – naprawa główna
Remont balkonów na elewacji wschodniej – naprawa bieżąca
Likwidacja okna na klatce schodowej                            i wykonanie w to miejsce drzwi wejściowych do budynku ( strona południowa )	

42.026,03	

Lipiec - Październik	

Zapobiegawczy charakter naprawy	

	

7	
Bystra Śląska, ul. J. Fałata              i ul. Szczyrkowska	Budynek, ul. J. Fałata  2G :
Wymiana :
•	okien na klatkach schodowych                          i korytarzu oraz drzwi wejściowych                   w obu klatkach schodowych
Odnowienie wspólnych łazienek i wc
Ocieplenie dobudowanej części budynku  – naprawa bieżąca	

51.254,59	

Lipiec - Październik	

Zapobiegawczy charakter naprawy	

	

8	

Bystra Śląska, ul. J. Fałata              i ul. Szczyrkowska	

Budynek chlewni, ul. J. Fałata 2H
Rozbiórka budynku	

28.991,53	

Lipiec - Październik	Zły stan techniczny powodujący możliwość wystąpienia katastrofy budowlanej	

9	
Bystra Śląska, ul. J. Fałata              i ul. Szczyrkowska	Budynek, ul. Szczyrkowska 73, 75                                 i ul. J. Fałata 2G :
Naprawa instalacji piorunochronnej oraz przeprowadzenie badań jej skuteczności                      – naprawa bieżąca	

19.203,18	

Lipiec - Październik	
Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku	

	Razem Bystra Śląska,                       ul. J. Fałata                                      i ul. Szczyrkowska	

	
176.205,55				

10	

Bytom, ul. Piekarska 47 - 49	Wymiana :
•	drzwi wejściowych, 
•	stolarki okiennej, 
na klatce schodowej – naprawa główna	
30.774,77	
Lipiec - Październik	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników                  i osób trzecich	

11	
Bytom, ul. Piekarska 47 - 49	Naprawa instalacji piorunochronnej oraz przeprowadzenie badań jej skuteczności                      – naprawa bieżąca	
14.765,44	
Lipiec - Październik	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku	
	
	Razem Bytom
 ul. Piekarska 47 - 49
		
45.540,21				
12	Gliwice, ul. Ślusarska 6	Naprawa konstrukcji i pokrycia dachowego wraz z wymianą zużytych elementów rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich – naprawa bieżąca	16.553,95	Lipiec - Październik	Zapobiegawczy charakter naprawy		
	Razem Gliwice,                          ul. Ślusarska 6		
16.553,95				

13	

Górki Wielkie
 ul. Bielska 54	Remont kotłowni wraz z wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej zakończonej przeprowadzeniem badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – naprawa główna

51.216,63	

Lipiec - Październik	Zapobiegawczy charakter naprawy /
Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników                  i osób trzecich	
	
	Razem Górki Wielkie,                      ul. Bielska 54 		51.216,63				

14	

Górki Wielkie „Bucze”,                       ul. Harcerska 19	

Rozbiórka budynku chlewni 	

47.199,75	

Lipiec - Październik	Zły stan techniczny powodujący możliwość wystąpienia katastrofy budowlanej	

15	Górki Wielkie „Bucze”,                       ul. Harcerska 19	Osuszanie murów budynku – naprawa bieżąca	24.048,65	Lipiec - Październik	Zapobiegawczy charakter naprawy		

16	
Górki Wielkie „Bucze”,                       ul. Harcerska 19	Uzupełnienie dachówek wraz z wymianą jednej krokwi oraz częściową wymianą zużytych elementów rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich  – naprawa bieżąca	
5.681,61	
Lipiec - Październik	
Zapobiegawczy charakter naprawy	

17	
Górki Wielkie „Bucze”,                       ul. Harcerska 19	Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej zakończonej przeprowadzeniem badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – naprawa główna	
15.000,00	
Lipiec - Październik	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników                  i osób trzecich	
	
	Razem Górki Wielkie „Bucze”, ul. Harcerska 19	

	
91.930,01				

18	

Istebna, oś. Kubalonka	Budynek nr 684 :
Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach wspólnych ( klatka schodowa, łazienki, wc, kuchnie ) – naprawa główna	
52.258,19	
Lipiec - Październik	
Zapobiegawczy charakter naprawy 

19	
Istebna, oś. Kubalonka	Budynek nr 685 :
Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach wspólnych ( klatka schodowa, łazienki, wc, kuchnie ) – naprawa główna	41.040,28	Lipiec - Październik	Zapobiegawczy charakter naprawy 

20	
Istebna, oś. Kubalonka	Budynek nr 833 :
Likwidacja płyt eternitowych i wykonanie nowej elewacji budynku 
Wymiana wewnętrznej instalacji wodnej oraz 
centralnego ogrzewania – naprawa główna	

202.224,23	

Lipiec - Październik	
Zapobiegawczy charakter naprawy 

	

21	
Istebna, oś. Kubalonka	Budynek nr 686 :
Wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody – naprawa główna	
121.630,87	
Lipiec - Październik	
Zapobiegawczy charakter naprawy 

22	
Istebna, oś. Kubalonka	Budynek nr 687 :
Wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody – naprawa główna	
111.732,15	
Lipiec - Październik	
Zapobiegawczy charakter naprawy 

23	
Istebna, oś. Kubalonka	Budynek nr 688 :
Wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody – naprawa główna	
112.660,14	
Lipiec - Październik	
Zapobiegawczy charakter naprawy 
		
	Razem Istebna,                          oś. Kubalonka	

	
641.575,86				

24	Jastrzębie – Zdrój,
ul. Aleja Jana Pawła II 5	Skucie ceramicznej okładziny elewacyjnej od strony południowo – zachodniej i północno – zachodniej – naprawa bieżąca	
155.000,00	
Czerwiec – Sierpień 	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników                  i osób trzecich	Decyzja PINB                Nr 46 / 07
z dnia 19.03.2007r.	

25	

Jastrzębie – Zdrój,
ul. Aleja Jana Pawła II 5	- Usunięcie istniejących rys i odnowienie ścian klatki schodowej.
- Skucie luźnych fragmentów tynku ze spodniej części płyt balkonowych i uzupełnienie powstałych ubytków oraz wymiana obróbek blacharskich.
- Skucie luźnych cegieł oraz odspojonych fragmentów tynku z bocznych ścian zewnętrznych schodów  oraz uzupełnienie ubytków w poszczególnych stopniach.
- Skucie luźnych cegieł oraz odspojonych fragmentów tynku z bocznych ścian pochylni zewnętrznej oraz zlikwidowanie uskoków                     i szczelin w nawierzchni pochylni – naprawa bieżąca	

130.000,00	

Lipiec - Grudzień	

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników                  i osób trzecich	

Decyzja PINB                Nr 46 / 07
z dnia 19.03.2007r.

	
	Razem Jastrzębie – Zdrój,
ul. Aleja Jana Pawła II 5		
285.000,00				

26	
Katowice, ul. Kościuszki 3	Wymiana :
•	stolarki okiennej i częściowo drzwiowej
•	instalacji centralnego ogrzewania – naprawa główna	

39.021,68	

Lipiec - Sierpień	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników                  i osób trzecich	

27	
Katowice, ul. Kościuszki 3	
Wyprowadzenie głównego zaworu gazu na zewnątrz budynku – naprawa bieżąca	
3.102,14	
Lipiec - Sierpień	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników                  i osób trzecich		
	
Razem Katowice
 ul. Kościuszki 3

	
42.123,82				

28	
Katowice, ul. Grabowa 1A	Naprawa pokrycia dachowego połączona                          z wymianą zużytych elementów rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich – naprawa bieżąca	
20.000,00	
Lipiec - Październik	
Zapobiegawczy charakter naprawy		
	Razem Katowice
 ul. Grabowa 1A		
20.000,00				

29	
Wisła Głębce,                           ul. Dworcowa 1	Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą zużytych elementów rynien, rur spustowych                     i obróbki blacharskiej wraz z  osuszeniem murów budynku – naprawa bieżąca	

45.063,30	

Lipiec - Październik	
Zapobiegawczy charakter naprawy

	
	Razem Wisła Głębce,                           ul. Dworcowa 1		45.063,30				
30
		Wykonanie dokumentacji technicznej	34.814,34	Kwiecień - Sierpień			
31		Roboty awaryjne na zarządzanych nieruchomościach	72.000,00	Styczeń - Grudzień			
	RAZEM
		1.930.000,00