Załącznik   nr   1 
								 do uchwały Nr 692/48/III/2007
								 Zarządu  Województwa Śląskiego
						z dnia 4.05.2007 r.
 
					AUTOPOPRAWKA 

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu  Inwestycyjnego  Województwa  Śląskiego  na   lata 2007-2009           i   po   roku  2009  (załącznik  Nr  15  do  Uchwały  Sejmiku  Województwa  Śląskiego          Nr III/3/2/2007 z dnia 29.01.2007 r.  w  sprawie  budżetu  Województwa  Śląskiego                      na 2007rok), przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 685/46/III/2007   w dniu 26.04.2007 roku.
	
Zmiany dotyczą inwestycji w zakresie kultury, a mianowicie:
poz. Nr 3 - „Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen „Królowa Luiza etap I”
1.	zmniejszenie w roku 2006 z równoczesnym zwiększeniem w roku 2007 środków Gminy Zabrze  o kwotę  388.868 zł (tj. z kwoty 366.000 zł do kwoty 754.868 zł). Powyższe środki z uwagi na brak możliwości wykorzystania w 2006 roku zostały zwrócone Gminie Zabrze. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy, ponownie   zostały przekazane do  budżetu Województwa Śląskiego  w  marcu  2007 roku,	
2.	zwiększenie  w  roku 2007  środków   budżetu  Województwa o kwotę  371.693 zł (tj.              z kwoty 277.775 zł do kwoty 649.468 zł). Omawiane środki pochodzą z oszczędności poprzetargowych   powstałych  w  2007 roku  na innych zadaniach  w zakresie kultury,
3.	zwiększenie wartości kosztorysowej zadania (z kwoty 2.188.634 zł do kwoty                 2.380.025 zł)

poz. Nr 4 - „Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen „Królowa  Luiza  etap  II”
1	zmniejszenie w roku 2006 z równoczesnym zwiększeniem w roku 2007 środków Gminy Zabrze  o kwotę  200.000 zł (tj. z kwoty 26.019 zł do kwoty 226.019 zł). Powyższe środki z uwagi na brak możliwości wykorzystania w 2006 roku zostały zwrócone Gminie Zabrze. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy, ponownie   zostały przekazane do budżetu Województwa Śląskiego w marcu 2007 roku,	
2.	zmniejszenie w roku 2007 o kwotę 325.600 zł środków budżetu Województwa  (tj.  z kwoty 672.981 zł do kwoty  347.381 zł), w związku z przeprowadzonym przetargiem na wykonanie dokumentacji technicznej. Powstałe oszczędności zostały  przeznaczone na realizację I etapu inwestycji (poz. Nr 3)
3.	zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania (z kwoty 12.191.001 do kwoty 11.865.401),

poz. Nr 6 - „Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej - rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego  w  Koszęcinie”
-	zwiększenie w 2007 roku środków budżetu Województwa o kwotę 2.600.000 zł  (tj.               z kwoty 3.889.671 zł do kwoty 6.489.671 zł), w związku z koniecznością sfinansowania rozszerzonego programu rzeczowo-finansowego zadania o pozycję dotyczącą wykonania prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych w lewym skrzydle pałacu koszęcińskiego. Proponowana kwota dofinansowania pochodzi z oszczędności powstałych na zadaniach realizowanych w dziale 921  (kwota 967.407 zł) oraz z propozycji zgłoszonych do podziału nadwyżki budżetowej (kwota 1.632.593 zł),
-	zwiększenie wartości kosztorysowej zadania (z  kwoty 10.719.839 zł do kwoty 13.319.839 zł) ,

poz. Nr 11 - „Przebudowa i modernizacja siedziby Teatru Rozrywki w Chorzowie ”
-	zwiększenie w 2007 roku środków budżetu Województwa o kwotę 1.057.500 zł  (tj.             z kwoty 7.104.590 zł do  kwoty 8.162.090 zł), z uwagi na konieczność sfinansowania rozszerzonego zakresu robót i usług nieobjętych projektem budowlano-wykonawczym, których potrzeba wykonania wystąpiła w trakcie prowadzonych robót. Proponowana kwota dofinansowania pochodzi z oszczędności powstałych na zadaniach realizowanych w dziale 921,
-	zwiększenie wartości kosztorysowej zadania (z kwoty 12.385.736 zł do kwoty         13.443.236 zł)