A N E K S  nr 1
do Porozumienia nr 44/KT/2005 z dnia 05.07.2005 r.
zawarty w dniu   ..............................  
pomiędzy :
pomiędzy :
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa 
w osobach:
- Jana Greli			-	Wicemarszałka Województwa 
- Wiesława Marasa		-	Członka Zarządu Województwa 
a
Gminą Konopiska z siedzibą w Konopiskach przy ul. Lipowej 5 reprezentowaną przez Wójta Jerzego Sochę.
§ 1
Na podstawie § 5 Porozumienia nr 44/KT/2005 z dnia 05.07.2005r. strony postanawiają zmienić:
I.	brzmienie § 1 pkt.1 na następujące: ”Przedmiotem porozumienia jest współpraca przy realizacji zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 w m. Konopiska.”
II.	brzmienie § 2 pkt. 3  na następujące: „Środki finansowe wynikające ze współudziału Województwa Śląskiego w realizacji zadania do kwoty 1.050.000 zł przewidzianej w planie na 2005r. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże, na pisemny wniosek Wójta Gminy Konopiska, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku wystawionego po odbiorze przedmiotu porozumienia. Do wniosku dołączone zostaną kopie rachunków i faktur.”
III.	brzmienie § 3  na następujące: 
1.	Prowadzącym zadanie będzie Gmina Konopiska, przy czym nadzór nad jego realizacją sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
2.	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego w części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniona z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
3.	Gmina przeprowadzi procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy.
4.	Zarząd Województwa Śląskiego zostanie powiadomiony o koszcie zadania wynikającym z umowy zawartej z wykonawcą zadania.
5.	Gmina zawrze umowę z wykonawcą zadania.
6.	Gmina powiadomi Zarząd Dróg Wojewódzkich o terminie odbioru końcowego zadania od wykonawcy. Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich uczestniczyć będzie w odbiorze zadania.
7.	Gmina przekaże wybudowany ciąg pieszo-rowerowy Województwu Śląskiemu nieodpłatnie za protokołem zdawczo-odbiorczym.
IV. zmienić brzmienie § 4 pkt. 1 na następujące: „Porozumienia zawiera się na okres do 15 grudnia 2006r.”
§ 2
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 
§ 3
Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.
§ 4
Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

Województwo								Gmina