AKTUALIZACJA
ZBIORCZEGO  ZESTAWIENIA  KOSZTÓW

Inwestycja :		MODERNIZACJA    I     ROZBUDOWA   OPERY ŚLĄSKIEJ  
    W   BYTOMIU  PO POŻARZE

Roboty:		BUDOWLANE   I   INSTALACYJNE

Inwestor:		URZĄD MARSZAŁKOWSKI
			WOJ. ŚLĄSKIEGO

Wartość:		12.380,7 tys. zł (brutto)
słownie: dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset zł.

Poziom cen:		  2003 r.

Data opracowania:	15.10.2003 r.

Sporządziła:

Część opisowa

I.	Podstawa opracowania
Dokumentacja projektowa opracowana przez  MPROJEKT Biuro Usług Projektowych - Bytom

II.	Dane techniczne obiektu
Powierzchnia zabudowy		m2   1.089,00
Powierzchnia użytkowa ogółem:	m2   3.028,45
Kubatura ogółem:			m3 15.351,64

III.	Podstawa wyceny
-	Poniesione nakłady 	do 30.09.2003r. 
-	Kosztorysy ofertowe
-	Kosztorysy dodatkowe
-	Wyceny szacunkowe robót (dla których brak opracowanej dokumentacji)
-	Zawarte umowy o prace projektowe
-	Nadzór inwestorski w wysokości 1,2 % od robót budowlano-montażowych
-	VAT w wysokości 7 %  od robót bud-mont
-	                               22% od kosztu  opracowania  dokumentacji,   
-	                               wyposażenia i nadzoru inwestorskiego                        
-	Rezerwa w wysokości 3 % od robót aranżacji sali reprezentacyjnej    -nie wykonanych

Zestawienie poniesionych nakładów do 30.09.2003r.

1.	Nakłady brutto poniesione:
-------------------------------------
w    2000r.						               852.000,00 zł
od 1.01.2001 – 31.12.2001r.					 1.231.731,76 zł
od 1.01.2002 – 31.12.2002r.					 2.969.306,32 zł
od 1.01.2003 – 30.09.2003 r                                                  2.073.259,66 zł
------------------------------------------------
razem poniesione nakłady
	do 30.09.2003r.					7.126.297,74 zł 

TABELA PODZIAŁU KOSZTÓW 

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Nakłady	Uwagi

			poniesione do 30.09.2003r.	do poniesienia po 30.09.2003r.		
1	2	3	4	5	6	
1.
2.	Dokumentacja
Zabezp. bud. OPERY	805,2
1.486,5	762,8
1.486,5	42,4
-		
3.	Zaplecze Adm.-Socjalne	1.836,8	1.455,0	381,8		
	roboty budowlane
instal. wody i kanaliz.
instal. c.o.
instal. wentyl. i klimat.
instal. elektr.
instal. sygn. p.poż.
dźwigi osobowe	1.042,4
146,2
103,7
266,2
158,0
56,1
64,2	858,3
146,2
99,3
208,7
130,0
12,5
-	184,1
-
4,4
57,5
28,0
43,6
64,2		
4.	SALA BALETU	1.795,0	1.580,0	215,0		
	roboty budowlane
instal. c.o.
instal. wentyl. i klimat.
instal. elektr.	11.549,3
45,3
61,2
139,2	1.349,2
45,3
46,3
139,2	200,1
-
14,9
-		
5.	STRONA POŁUDNIOWA	914,7	390,0	524,7		
	roboty budowlane
instal. wod-kan
instal. c.o.
instal. wentyl. i klimat.
instal. elektr.
instal. sygn. p.poż.	594,9
5,4
13,0
100,4
190,3
10,7	296,2
-
-
-
-
-	298,7
5,4
13,0
6,6
190,3
10,7		
6.	STRONA PÓŁNOCNA	1.456,2	678,0	778,2		
	roboty budowlane
instal. wod-kan
instal. c.o.
instal. wentyl. i klimat.
instal. elektr.
instal. sygn. p.poż.	1.084,6
27,4
16,1
263,0
58,8
6,3	412,2
-
-
262,3
-
3,5	672,4
27,4
16,1
0,7
58,8
2,8		
7.	SALA REPREZENTACYJNA	2.438,4	166,5	2.271,9		
	roboty budowlane
instal. c.o.
instal. wentyl. i klimat.
instal. elektr.
instal. sygn. p.poż.
instal nagłaśniająca	1.734,7
121,7
111,5
421,4
24,5
24,6
	69,7
-
-
89,9
6,9
-	1.665,0
121,7
111,5
331,5
17,6
24,6		
8.	KAWIARNIA	586,0	540,0	46,0		

9
10	roboty budowlane
instal. c.o.
instal. elektr.
instal. sygn. p.poż.
dźwig osobowy
ELEWACJA
WYPOSAŻENIE	395,9
37,4
76,0
30,1
46,6
455,6
435,0
	349,9
37,4
76,0
30,1
46,6
-
-	46,0

 
 
455,6
435,0		
11	NADZÓR INWESTORSKI	131,5	67,5	64,0		
12.	REZERWA	39,8	-	39,8		
	RAZEM:	12.380,7	7.126,3	5.254,4