Aneks nr 4 do umowy wykonawczej dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” – I etap: zaplecze rozgrzewkowo – treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i dwa boiska sportowe oraz badanie lin konstrukcji stalowej dachu z dnia 23 grudnia 2013 r.

zawarty w dniu _________________ w Katowicach, pomiędzy: 
Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Ligonia 46, 40-029 Katowice, zwanym w dalszej części aneksu Województwem, reprezentowanym przez:

___________________________________ - ____________________________________________,

___________________________________ - ____________________________________________,
a
Stadion Śląski Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, nr KRS 0000477883, kapitał zakładowy 14.050.000,00 zł, NIP 954-274-52-09, REGON 243373827, zwaną w dalszej części aneksu Spółką, reprezentowaną przez:
Pana Jarosława Antoniaka – Prezesa Zarządu.

Zważywszy, że w wyniku realizacji przez Spółkę zadań publicznych, powierzonych umową wykonawczą dotyczącą wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” – I etap: zaplecze rozgrzewkowo – treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i dwa boiska sportowe oraz badanie lin konstrukcji stalowej dachu z dnia 23 grudnia 2013 r., zwaną w dalszej części aneksu Umową wykonawczą, dla osiągnięcia celów przedsięwzięcia powstała konieczność wykonania dodatkowych testów lin promieniowych, lin obwodowych i lin wieszaków, których nie objęła dotychczasowa systematyka badań określona w zakresie Umowy wykonawczej oraz umowy z dnia 15 września 2014 r. z Pfeifer Seil- und Hebetechnik Gmbh na „Montaż i podniesienie konstrukcji zadaszenia widowni oraz wykonanie monitoringu konstrukcji wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”, skutkująca rozszerzeniem zakresu powierzonych usług publicznych w zakresie wykonania zadania badania lin nośnych konstrukcji zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie, Województwo i Spółka zawierają niniejszy aneks o następującej treści:

§ 1
W Umowie wykonawczej Województwo i Spółka zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian:
1)	w dziale IV Umowy wykonawczej w ust. 1 wyrażenie „11 miesięcy od dnia wykonania w całości obowiązków Województwa, o których mowa w ust. 2 niniejszego działu umowy” zastąpić wyrażeniem „do dnia 30 czerwca 2015 r.”,
2)	w dziale VI Umowy wykonawczej w ust. 2 pkt 4 po dotychczasowej jego treści dodać treść: „Pierwsza zaliczka rekompensaty eksploatacyjnej obejmować będzie okres od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi zarządzania do dnia 30 czerwca 2015 r. Wypłata półrocznej zaliczki nastąpi do dnia 30 czerwca 2015 r., a jej rozliczenie nastąpi do 25 dnia miesiąca następującego po półroczu, za które wypłacono rekompensatę zaliczkowo.”,
3)	w załączniku nr 1 do Umowy wykonawczej, w części dotyczącej zakresu przedmiotu umowy pn. Zakres I: Badanie stanu lin konstrukcji stalowej dachu Stadionu Śląskiego w Chorzowie w celu określenia ich dalszej przydatności po awarii budowlanej z 15 lipca 2011 r., dodać pkt. 9 o następującej treści: Wykonania dodatkowych testów lin promieniowych, lin obwodowych i lin wieszaków, których nie objęła dotychczasowa systematyka badań określona w zakresie Umowy wykonawczej oraz umowy z dnia 15 września 2014 r. „Montaż i podniesienie konstrukcji zadaszenia widowni oraz wykonanie monitoringu konstrukcji, wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie.”,
4)	w załączniku nr 1 do Umowy wykonawczej, w części dotyczącej zakresu przedmiotu umowy pn. Zakres I: Badanie stanu lin konstrukcji stalowej dachu Stadionu Śląskiego w Chorzowie w celu określenia ich dalszej przydatności po awarii budowlanej z 15 lipca 2011 r., dotychczasowej treści:
„Województwo i Spółka zgodnie ustalają, iż zakres przedmiotu niniejszego zadania publicznego szczegółowo określa załącznik 4 do SIWZ przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Województwo Śląskie, to jest pn. „Montaż i podniesienie konstrukcji zadaszenia widowni oraz wykonanie monitoringu konstrukcji, wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura Stadionu Śląskiego w Chorzowie”, stanowiący integralną część Umowy, i winien być wykonany zgodnie z postanowieniami umowy na „Montaż i podniesienie konstrukcji zadaszenia widowni oraz wykonanie monitoringu konstrukcji, wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura Stadionu Śląskiego w Chorzowie” z dnia 15 września 2014 r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Pfeifer Seil – und Hebetechnik GmbH, oraz umową cesji z dnia 15 września 2014 r.” 

nadać brzmienie: 

„Województwo i Spółka zgodnie ustalają, iż zakres przedmiotu niniejszego zadania publicznego – w części dotyczącej powyżej wskazanych ust. od 1 do 8 - szczegółowo określa załącznik nr  4 do SIWZ przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Województwo Śląskie, to jest pn. „Montaż i podniesienie konstrukcji zadaszenia widowni oraz wykonanie monitoringu konstrukcji, wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura Stadionu Śląskiego w Chorzowie”, stanowiący integralną część Umowy, i winien być wykonany zgodnie z postanowieniami umowy na „Montaż i podniesienie konstrukcji zadaszenia widowni oraz wykonanie monitoringu konstrukcji, wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura Stadionu Śląskiego w Chorzowie” z dnia 15 września 2014 r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Pfeifer Seil – und Hebetechnik GmbH, oraz umową cesji z dnia 15 września 2014 r.”

§ 2
Na podstawie działu VI ust. 2 pkt 7 Umowy wykonawczej Województwo i Spółka zgodnie ustalają wysokość rekompensaty eksploatacyjnej na rok 2015 na kwotę 675 925 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć  złotych).

§ 3
Pozostała treść Umowy wykonawczej pozostaje bez zmian.

§ 4
Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.

Województwo:

_____________________________

_____________________________

Spółka:

_____________________________