Załącznik nr 2
do uchwały nr 1724/133/V/2016
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 23.08.2016 r.
Aneks 1
z dnia .................... 2016 r.
do Porozumienia nr  29/KT/2015 z dnia 16.05.2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Poczesna prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w gminie Poczesna- etap III"
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.460 z póżn. zmianami )
pomiędzy :
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:	
Stanisława Dąbrowy	Wicemarszałka Województwa Śląskiego	
Aleksandry Skowronek	Wicemarszałka Województwa Śląskiego	
a	
Gminą Poczesna, z siedzibą w Poczesnej przy ul. Wolności 2  reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Ujmę	
zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia o następującej treści:	
§ 1. 
Na podstawie § 2 ust.7 i § 10 ust. 2 Porozumienia nr  29/KT/2015 z dnia 16.05.2015 r.  strony postanawiają zmienić brzmienie:
1. § 1 ust. 2  na następujące: "Zakres rzeczowy określonego w ust. 1 zadania obejmuje: budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w gminie Poczesna od km 13+961 do km 14+950 tj. od szkoły podstawowej w Nieradzie do ul. Zakole w Bargłach."
2. § 2 ust. 1  na następujące: „Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje koszty robót budowlanych,  nadzoru, projektu docelowej organizacji ruchu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i wynosi 888.922 zł (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych).”,
3. § 2 ust. 2 na następujące: "Gmina Poczesna uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 30 % kosztu zadania określonego w ust. 1 w zaokrągleniu do pełnego złotego tj. 266.677  zł”,
4. § 3 ust. 1 na następujące: "Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Poczesna środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust.9 na pisemne wnioski Wójta, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od ich dostarczenia w dwóch transzach::
1) I transza w wysokości do 266.677 zł po wykonaniu i odebraniu części zadania, w całości ze środków własnych Województwa Śląskiego,
2) II transza w pozostałej wysokości po wykonaniu i odebraniu całości zadania w  tym środki stanowiące pomoc finansową Gminy Poczesna,
5. § 3 ust. 2 na następujące: „Do wniosków, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołu częściowego lub końcowego odbioru wykonanych robót dokonanego z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Katowicach oraz rachunków i faktur.”
6. § 5 ust. 5 na następujące: "Gmina Poczesna ustali z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach terminy odbiorów częściowego i końcowego zadania."
§ 2. 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.
§ 3. 
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.
§ 4. 
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 5. 
Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Województwo Śląskie	Gmina Poczesna	

 
WICEMARSZAŁEK

Stanisław Dąbrowa 

WICEMARSZAŁEK

Aleksandra Skowronek 	WÓJT

Krzysztof Ujma