Załącznik nr 3
 do uchwały nr 1724/133/V/2016
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 23.08.2016 r.
Aneks 2
z dnia .................... 2016 r.
do Porozumienia nr  28/KT/2016 z dnia 10.05.2016 r.  w sprawie powierzenia Gminie Ogrodzieniec prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Kolonia Giebło – etap IV"
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.460 z póżn. zmianami )
pomiędzy :
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:	
Stanisława Dąbrowy	Wicemarszałka Województwa Śląskiego	
Aleksandry Skowronek	Wicemarszałka Województwa Śląskiego	
a	
Gminą Ogrodzieniec, z siedzibą w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25 reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Mikulskiego	
zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia o następującej treści:	
§ 1. 
Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr  28/KT/2016 z dnia 10.05.2016 r.  wraz z Aneksem nr 1 z dnia 21.07.2016 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:
1. § 2 ust. 1 na następujące: „Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje koszty robót budowlanych, koszty nadzorów, koszt aktualizacji kosztorysów inwestorskich, koszt aktualizacji organizacji ruchu i wynosi 609.061 zł (sześćset dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych)”.
2. § 3 ust. 1 na następujące: "Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Ogrodzieniec środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust.9 na pisemne wnioski Wójta, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od ich dostarczenia w trzech transzach transzach:
1) I transza w wysokości do 360.000 zł po wykonaniu i odebraniu części zadania, ze środków stanowiących pomoc Gminy dla Województwa Śląskiego oraz środków  własnych Województwa Śląskiego,
2) II transza w wysokości do 150.000 zł po wykonaniu i odebraniu części zadania, ze środków własnych Województwa Śląskiego,
3) III transza w pozostałej wysokości po wykonaniu i odebraniu całości zadania ze środków własnych Województwa Śląskiego,
5. § 3 ust. 2na następujące: „Do wniosków, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołu częściowego lub końcowego odbioru wykonanych robót dokonanego z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Katowicach oraz rachunków i faktur.”
6. § 5 ust. 5 na następujące: "Gmina Ogrodzieniec ustali z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach terminy odbiorów częściowego i końcowego zadania."
§ 2. 
Na podstawie §  2 ust. 7  strony ustalają:
1. Kwota udziału finansowego Gminy Ogrodzieniec w realizacji zakresu rzeczowego zadania wynosi 30% kosztu zadania określonego w § 2 ust. 1  w zaokrągleniu do pełnego złotego tj. 182.718 zł.
2. Kwota udziału finansowego Województwa Śląskiego w realizacji zakresu rzeczowego adania wynosi 70% kosztu zadania określonego w § 2 ust. 1.".
§ 3. 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.
§ 4. 
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.
§ 5. 
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 6. 
Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Województwo Śląskie	Gmina Ogrodzieniec	

 
WICEMARSZAŁEK

Stanisław Dąbrowa 

WICEMARSZAŁEK

Aleksandra Skowronek 	BURMISTRZ

Andrzej Mikulski