Załącznik do Uchwały nr 111/15/V/2015
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 05.02.2015 r.
Aneks Nr 6
z dnia .................... 2015 r.
do Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r.wraz z aneksami powierzającego Miastu Racibórz prowadzenie zadania pn.:„Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”
zawarty pomiędzy :
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:	
................................	..........................	
................................	..........................	
a	
Miastem Racibórz, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie umowy o współpracy z dnia 28 lutego 2012 r., reprezentowanym przez Prezydenta Mirosława Lenka
	
§ 1. 
Na podstawie § 8 ust. 2 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. Strony wprowadzają następujące zmiany:
A. W § 4 c  dodaje się ust. 7 o następującej treści: „W roku 2014 poniesiony koszt zadania wynikający z zakończonych prac projektowych wyniósł 206.640,00 zł z udziałem 134.316,00 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 72.324,00 zł po stronie Miasta Racibórz".
B. W § 4c dodaje się ust. 8 o następującej treści: „W roku 2014 wykonany zakres prac obejmował:
- wykonanie projektu koncepcyjnego przebiegu wraz z materiałami do Karty informacyjnej i Raportu oddziaływania na środowisko,
- przeprowadzenie konsultacji społecznych, "
C. Na podstawie 4 ust. 7 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. wraz z aneksami po § 4c dodaje się § 4d o następującej treści:
"§ 4d.
1. W roku 2015 koszt zadania na podstawie harmonogramu prac projektowych zakłada się na poziomie 1.692.480,00 zł z tego 1.100.112,00 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 592.368,00 zł po stronie Miasta Racibórz.
2. Zakres prac projektowych na rok 2015 obejmuje:
- wykonanie inwentaryzacji środowiskowej (niezakończone w roku 2014),
- wykonanie karty informacyjnej i raportu oddziaływania na środowisko (niezakończone w roku 2014),
- wykonanie oceny stanu technicznego istniejącej konstrukcji nawierzchni (realizacja przeniesiona z roku 2014),
- wykonanie pomiarów ruchu drogowego (niezakończone w roku 2014),
- wykonanie projektu koncepcyjnego rozwiązań technicznych,
- wykonanie wstępnego audytu bezpieczeństwa,
- wykonanie mapy do celów projektowych,
- przygotowanie materiałów do regulacji pasa drogowego,
- wykonanie mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi,
- wykonanie map zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie specustawy drogowej,
- sporządzenie wykazu działek niezbędnych do realizacji inwestycji oraz geodezyjnych załączników do wniosku o wydanie decyzji ZRID,
- wykonanie badania geotechnicznego oraz określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego,
- wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz hydrogeologicznej,
- wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu,
- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
- wykonanie inwentaryzacji zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz planu wyrębu,
- uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
- przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykonanie projektu zmiany organizacji rcuhu na czas budowy,
- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu.
3. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej określonej w ust. 1 na pisemne wnioski Prezydenta, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w poniższych transzach:
1) transza w wysokości do 118.080,00 zł,w tym środki stanowiące pomoc finansową Miasta Racibórz oraz środki własne, w odpowiednich udziałach określonych w§ 4 ust. 2 i ust. 4 po wykonaniu prac określonych w ust. 2 tiret 1, 2 i 4,
2) transza w wysokości do 68.880,00 zł,w tym środki stanowiące pomoc finansową Miasta Racibórz oraz środki własne, w odpowiednich udziałach określonych w§ 4 ust. 2 i ust. 4 po wykonaniu prac określonych w ust. 2 tiret 12 i 13,
3) transza w wysokości do 63.960,00 zł,w tym środki stanowiące pomoc finansową Miasta Racibórz oraz środki własne, w odpowiednich udziałach określonych w§ 4 ust. 2 i ust. 4 po wykonaniu prac określonych w ust. 2 tiret 5 i 16,
4) transza w wysokości do 137.760,00 zł,w tym środki stanowiące pomoc finansową Miasta Racibórz oraz środki własne, w odpowiednich udziałach określonych w§ 4 ust. 2 i ust. 4 po wykonaniu prac określonych w ust. 2 tiret 6, 7 i 17,
5) transza w wysokości do 649.440,00 zł,w tym środki stanowiące pomoc finansową Miasta Racibórz oraz środki własne, w odpowiednich udziałach określonych w§ 4 ust. 2 i ust. 4 po wykonaniu prac określonych w ust. 2 tiret 3, 8, 9, 14, 15 i 18,
6) transza w wysokości do 624.840,00 zł,w tym środki stanowiące pomoc finansową Miasta Racibórz oraz środki własne, w odpowiednich udziałach określonych w§ 4 ust. 2 i ust. 4 po wykonaniu prac określonych w ust. 2 tiret 10 i 11,
7) transza w wysokości do 29.520,00 zł,w tym środki stanowiące pomoc finansową Miasta Racibórz oraz środki własne, w odpowiednich udziałach określonych w§ 4 ust. 2 i ust. 4 po wykonaniu prac określonych w ust. 2 tiret 19 i 20.
4. Do wniosków, o których mowa w ust. 3 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu częściowego lub końcowego odbioru dokonanego przez Miasto Racibórz, zgodnie z § 6 ust. 3 oraz rachunków i faktur i pozytywnych opinii ZDW i GDDKiA do każdej części składowej opracowania. W przypadku braku konieczności opiniowania przez ZDW lub GDDKiA określonej części składowej opracowania, Miasto Racibórz uzyska pismeną informację z ZDW lub GDDKiA.
5. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy opracowania kary te podlegają zwrotowi na wskazany rachunek bankowy Województwa Śląskiego, w części równej udziałowi Województwa Śląskiego w kosztach realizacji opracowania określonej w § 4 ust. 4 wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą.
6. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego."
§ 2. 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.
§ 3. 
Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.
§ 4. 
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 5. 
Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla
Miasta Racibórz oraz dwa dla Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie								 Miasto Racibórz