Załącznik do Uchwały nr 1977/141/V/2016
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 27.09.2016 r.
		UMOWA

zawarta w dniu ……………………… w Katowicach, pomiędzy:
Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1440), 
z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, 
reprezentowanym przez:
1. ……………………………….             -    ……………………………..	
2. ……………………………….             -    …………………………….. 
a 
PBC Spółka z o.o. z siedzibą pod adresem: 40-555 Katowice, ul. Rolna 12A, posiadającą REGON: 241645322 i NIP 634 - 27 – 53 – 272, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Katowicach, pod numerem KRS 0000359808, 
reprezentowana przez: 
1. Czesława Połednioka  -  Wiceprezesa Zarządu
zwana dalej „INWESTOREM”:

o treści następującej:	

Ustalenia zawarte w niniejszej umowie dotyczą szczegółowych warunków przebudowy układu komunikacyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 942 (ul. Myśliwska) z ul. Górską w Szczyrku spowodowanej inwestycją niedrogową - Rozbudowa kolei górskiej na górę „Beskid”, zgodnie 
z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1440).
§ 1
Przedmiot umowy
1.	Przedmiotem umowy jest przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu w oparciu o ww. dokumentację przebudowy układu komunikacyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 942 - ul. Myśliwskiej z ul. Górską w Szczyrku wraz z  budową sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. Lokalizacja  przedsięwzięcia przedstawiona jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
2.	W ramach przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 przewiduje się:
a)	opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej dokumentację budowlaną przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej (DW nr 942) z ul. Górską w Szczyrku, projekt stałej i czasowej organizacji ruchu oraz dokonanie uzgodnień branżowych. Dokumentacja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami i wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl, oraz zawierać wszelkie wymagane atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów. Koncepcja Programowa budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Beskidzkiej z ul. Myśliwską oraz ul. Górską w Szczyrku została uzgodniona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (pismo nr WIR.6026.625.2016.PDOM.10089.16 z dnia 28.06.2016 r.)
b)	przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ul. Myśliwskiej (DW nr 942) z ul. Górską w Szczyrku w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w pkt a).
3.	Przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 jest wynikiem realizacji przez INWESTORA inwestycji niedrogowej tj. Rozbudowa kolei górskiej na górę „Beskid” w Szczyrku.
4.	Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.
§ 2 
Obowiązki Inwestora
1.	Przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 prowadzone będzie zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
2.	INWESTOR uzyska wymagane zezwolenie na realizację dla zamierzenia budowlanego, o którym mowa 
w § 1 ust. 2b w trybie przepisów ustawy - Prawo budowlane w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2a uzgodnioną z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 
3.	INWESTOR przekaże niezwłocznie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach kopię kompletu dokumentacji objętej uzyskanym zezwoleniem, o którym mowa w ust. 2 wraz z kopią tego zezwolenia.
4.	INWESTOR zobowiązuje się przekazać do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach harmonogram robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia nie później niż 14 dni przed przekazaniem mu terenu budowy oraz do bieżącej aktualizacji harmonogramu.
§ 3
Nieruchomości
1.	INWESTOR oświadcza, że przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 2b będzie realizowane w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 942.
2.	W przypadku, gdy w wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 2b powstanie konieczność zajęcia nieruchomości innych niż zlokalizowane w granicach istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 942 INWESTOR dokona wszelkich czynności oraz poniesie wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego uregulowania stanu ich własności tj. przekazania nieodpłatnie takich nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego (w tym m.in. koszty dokumentacji geodezyjnej, prawnej, koszty aktu notarialnego).
3.	Nieruchomości zajmowane pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 942, o których mowa w ust. 2 winny być wolne od wpisów i obciążeń w dziale III i dziale IV ksiąg wieczystych.
4.	Regulacje, o których mowa w ust. 2 należy przygotować w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a dokumentację geodezyjną należy wykonać na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (załącznik E).
5.	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w ust. 2 winno nastąpić przed przekazaniem przebudowanego obiektu drogowego zgodnie z § 6 ust. 1. 
§ 4
Zasady finansowania przedsięwzięcia
1.	INWESTOR pokryje wszelkie koszty opracowania dokumentacji, przygotowania i realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszej umowy.
2.	INWESTOR pokryje wszelkie koszty robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
3.	Zarząd Województwa Śląskiego nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez INWESTORA w związku z realizacją przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
4.	INWESTOR nie oczekuje od Zarządu Województwa Śląskiego żadnego udziału finansowego przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.
5.	W przypadku konieczności wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 942, wszelkie formalności oraz koszty związane z wycinką drzew leżą po stronie INWESTORA.
§ 5
Realizacja przedsięwzięcia
1.	Rozpoczęcie przez INWESTORA przebudowy, o której mowa w § 1 ust. 2b nastąpi po protokolarnym przekazaniu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 942 będącego terenem budowy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach i udokumentowaniu aktualnego stanu tego pasa, dokonanym przed wykonywaniem jakichkolwiek robót budowlanych.
2.	INWESTOR dokona przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej (DW nr 942) z ul. Górską w Szczyrku siłami własnymi lub zatrudnionych wykonawców, ponosząc wszelką odpowiedzialność z tytułu wykonywania działalności inwestycyjnej – w tym wobec osób trzecich, przy czym zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290) INWESTOR ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego. 
3.	Nadzór techniczny z ramienia zarządcy drogi będzie prowadził Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 
4.	Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót związanych z przebudową skrzyżowania, o której mowa w § 1 ust. 2b oraz docelowa organizacja ruchu powinny zostać wprowadzone na podstawie projektów organizacji ruchu zatwierdzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego.
5.	INWESTOR zobowiąże wykonawcę do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujące wady wykonawcze oraz materiałowe) związane z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej (DW nr 942) z ul. Górską w Szczyrku oraz urządzenia sygnalizacji świetlnej zabudowane na tym skrzyżowaniu, nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego oraz do udzielenia gwarancji na okres: 
•	24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,
•	36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego,
•	60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania wykonane taśmami prefabrykowanymi.
6.	INWESTOR udzieli rękojmi za wady fizyczne na okres wskazany w ust. 5.
7.	INWESTOR usunie wadę na przebudowanym obiekcie drogowym niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie 30 dni od wezwania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
8.	Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w przypadku stwierdzonych rażących zaniedbań podczas realizacji przebudowy INWESTOR winien zapewnić wymianę kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego.
9.	INWESTOR zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono roboty budowlane (dotyczy to również dróg dojazdowych, z których korzystał, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze budowy) oraz doprowadzić te tereny do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.
10.	INWESTOR będzie powiadamiać Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o odbiorze robót zanikających 
i odbiorze końcowym realizowanego przedsięwzięcia z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku odbioru końcowego termin ten wynosi co najmniej 2 tygodnie.
11.	Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru końcowego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 942 wraz z budową sygnalizacji świetlnej 
w Szczyrku. Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Kopię tego raportu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach niezwłocznie dostarczy do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.
12.	W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podczas ww. odbioru końcowego INWESTOR zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia i do pokrycia wszystkich kosztów związanych z tym usunięciem.
		§ 6
Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego
1.	INWESTOR po przebudowaniu układu komunikacyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 942 (ul. Myśliwskiej ) z ul. Górską w Szczyrku oraz wybudowaniu sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu przekaże, z zastrzeżeniem ust. 2, przebudowany obiekt drogowy Zarządowi Województwa Śląskiego nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Przekazanie przebudowanego obiektu drogowego wymaga uprzedniego:
a)	wprowadzenia docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego,
b)	dokonania wymaganego zgłoszenia i przeprowadzenia przez organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Śląskiego) kontroli wykonania zadań technicznych wynikających 
z realizacji projektu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003 r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
c)	uregulowania stanu własności na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości, 
o których mowa w § 3 ust. 2.
2.	INWESTOR przekaże przebudowaną infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom. 
3.	INWESTOR określi do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1, na podstawie poniesionych wydatków, wartość przedmiotu przekazania.
4.	W związku z przebudowaniem i przekazaniem obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego, INWESTOROWI nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Województwa Śląskiego.
5.	Przejęcie przebudowanego obiektu drogowego przez zarządcę drogi wojewódzkiej – Zarząd Województwa Śląskiego nastąpi wraz z przejęciem gwarancji udzielonej/ych INWESTOROWI przez wykonawcę/ców przebudowy. W imieniu zarządcy drogi będzie uprawniony do występowania i dochodzenia roszczeń wynikających z udzielonych gwarancji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
6.	Przejęcie przebudowanego obiektu drogowego nastąpi z dniem podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1.
7.	INWESTOR zobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu drogowego w terminie 
do dnia 30.12.2016 r.
8.	Z dniem przejęcia przebudowanego obiektu drogowego na Zarząd Województwa Śląskiego przechodzą:
•	wszelkie obowiązki i koszty związane z jego utrzymaniem we właściwym stanie,
•	wszelkie koszty wynikające z jego napraw (po upływie gwarancji) i innych robót koniecznych dla prawidłowego jego funkcjonowania i utrzymania w należytym stanie, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia przekazanego obiektu drogowego,
•	odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe po dniu przejęcia.
9.	INWESTOR dostarczy do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego celem spisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1 następujące dokumenty:
a)	oświadczenie INWESTORA o całkowitej wartości brutto przedmiotu przekazania – przebudowanego skrzyżowania wojewódzkiej nr 942 oraz wybudowanej sygnalizacji świetlnej,
b)	potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji dotyczącej udzielonych przez wykonawcę gwarancji na roboty budowlane oraz urządzenia sygnalizacji świetlnej zabudowane na tym skrzyżowaniu,
c)	potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię raportu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, 
o którym mowa w § 5 ust. 11;
Wymienione dokumenty INWESTOR powinien dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego co najmniej na 21 dni przed upływem terminu przekazania, o którym mowa w ust. 7.
10.	W odrębnym trybie zostanie ustalona pomiędzy INWESTOREM a Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach kwestia związana z umową przyłączeniową niezbędną do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej.  
§ 7
Odpowiedzialność za szkody
1.	Do dnia przekazania przebudowanego obiektu drogowego Zarządowi Województwa Śląskiego na podstawie protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 1 odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich oraz zarządcy drogi – Zarządu Województwa Śląskiego ponosi INWESTOR.
2.	INWESTOR zobowiązuje się wobec Zarządu Województwa Śląskiego do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich ewentualnych szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych z realizacją niniejszej umowy, 
a w szczególności INWESTOR ponosi pełną odpowiedzialność, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją umowy.
§ 8
Kary umowne
1.	Za nieprzekazanie przebudowanego obiektu drogowego, w terminie określonym w § 6 ust. 7 INWESTOR zapłaci Województwu Śląskiemu karę umowną w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych). 
2.	W przypadku stwierdzenia rozpoczęcia prac drogowych bez wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem, INWESTOR może zostać obciążony karą umowną w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
3.	Nieuiszczenie przez INWESTORA kary umownej wynikającej z wystawionej noty księgowej po uprzednich wezwaniach do zapłaty skutkuje skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.
§ 9
Postanowienia końcowe
1.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.	INWESTOR nie może bez zgody Zarządu Województwa Śląskiego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
3.	Niniejsza umowa obowiązuje do dnia podpisania przez INWESTORA oraz Zarząd Województwa Śląskiego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust. 1.
§ 10
Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszej umowy należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zarządu Województwa Śląskiego.
§ 11
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego oraz jeden dla INWESTORA.
	
Zarząd Województwa Śląskiego	INWESTOR

Załącznik nr 1 do umowy nr …………… z dnia ……………………

Raport zakończenia realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej (DW nr 942) z ul. Górską w Szczyrku”
podpisany w dniu …………………….

1.	Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną.                                  jest / brak *

Protokół z dnia   ………………………………………………... 
	
2.	Wykonanie zadań technicznych wynikających z realizacji projektu zatwierdzonego przez Marszałka 
Województwa Śląskiego pismem nr …………………..………………... z dnia …………………….                    jest / brak *

3.	Zgoda na użytkowanie przebudowanego obiektu bądź dokument, z którego wynika 
zgoda na eksploatację w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane                                     jest / nie dotyczy *

Pismo WiNB w Katowicach nr ………………………………………………… z dnia …………… 

4.	Realizacja inwestycji.                                              w istniejącym pasie drogowym / poza istniejącym pasem drogowym *

5.	Przekazanie dokumentów potwierdzających realizację inwestycji w istniejącym
pasie drogowym.                                                                                                                                                  tak / nie *

Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia ……….……………..………………………………………………. 

Przekazanie dokumentów potwierdzających realizację inwestycji poza istniejącym
pasem drogowym.                                                                                                                                tak / nie / nie dotyczy *

Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia ……….……………..………………………………………………. 

6.	Dokumentacja powykonawcza (w tym część geodezyjna oraz całość oznakowania) wersja drukowana 
i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w układzie 
geodezyjnym 2000.                                                                                                                                             jest / brak *

Potwierdzenie przekazania dokumentacji z dnia ……….……………..………………………………………………. 

7.	Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod pas drogi wojewódzkiej nr .....        zakończona / wymagana / nie dotyczy *

8.	Wykonawcą (działającym na rzecz INWESTORA) przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr ……… był:
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.	Uprawnienia z tytułu gwarancji na wykonane roboty budowlane wygasają dnia ………………………………. 
10.	Uprawnienia z tytułu gwarancji na urządzenia sygnalizacji 
świetlnej zabudowane na tym skrzyżowaniu wygasają dnia  ………………………………. 
        Uprawnienia z tytułu gwarancji na oznakowanie poziome 
•	24 miesiące dla oznakowania cienkowarstwowego, *
•	36 miesiące dla oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego, *
•	60 miesiące dla oznakowania wykonane taśmami prefabrykowanymi *
         wygasają dnia ………………………………. 

* - niepotrzebne skreślić

11.	Inne uwagi, ustalenia, postanowienia, zastrzeżenia wraz z ich uzasadnieniem:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 			INWESTOR
…………………………………………………………. 	                                    …………………………………………….
………………………………………………………….  	                                   …………………………………………….
…………………………………………………………. 	                                    …………………………………………….
            (stanowisko, czytelny podpis, pieczątka)		     (imię i nazwisko, czytelny podpis, pieczątka)
UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron)

Załącznik nr 2 do umowy nr …………… z dnia ……………………

ul. Myśliwska – DW 942

ul. Górska