Załącznik nr 2 do uchwały nr 2020/141/V/2016
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 04.10.2016 r. 
Aneks 2
z dnia .................... 2016 r.
do Porozumienia nr  62/KT/2015 z dnia 31.07.2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Mykanów prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 483 w miejscowości Kolonia Wierzchowisko"
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1440 )
pomiędzy :
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:	
Stanisława Dąbrowy	Wicemarszałka Województwa Śląskiego	
Aleksandry Skowronek	Wicemarszałka Województwa Śląskiego	
a	
Gminą Mykanów z siedzibą w Mykanowie przy ul. Samorządowej 1 reprezentowaną przez Wójta Dariusza Pomadę	
zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia o następującej treści:	
§ 1. 
Na podstawie  § 10 ust. 2 Porozumienia nr 62/KT/2015 z dnia 31.07.2015 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 29.06.2016 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:
1. § 1 ust. 7 na następujące: „Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 3 niniejszego porozumienia na 22 grudnia 2017 r."
2. § 2 ust. 3 na następujące: "Gmina Mykanów posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego w 2017r."
3. § 11 na następujące: „Porozumienie w zakresie przygotowania i sfinansowania prac określonych w  § 1 ust.3 zawiera się na okres do 31 grudnia 2017 r.".
§ 2. 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.
§ 3. 
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.
§ 4. 
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 5. 
Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Województwo Śląskie	Gmina Mykanów