Załącznik nr 4 do uchwały nr 2020/141/V/2016
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 04.10.2016 r. 

Aneks 2
z dnia .................... 2016 r.
do Porozumienia nr  70/KT/2015 z dnia 16.09.2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Zawiercie prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 796 w Zawierciu"
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1440 )
pomiędzy :
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:	
Stanisława Dąbrowy	Wicemarszałka Województwa Śląskiego	
Aleksandry Skowronek	Wicemarszałka Województwa Śląskiego	
a	
Gminą Zawiercie, z siedzibą w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 reprezentowaną przez Prezydenta Witolda Grima	

zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia o następującej treści:
	
§ 1. 
Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr  63/KT/2015 z dnia 31.07.2015 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 12.05.2016r. strony postanawiają zmienić brzmienie:
1. § 1 ust. 3 pkt. 1)  na następujące: „ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 796 (ul. Obrońców Poczty Gdańskiej) w Zawierciu na odcinku od km 1+306 do km 1+984 tj. końca istniejącego chodnika za zjazdem do byłych zakładów Przyjaźń do drzewa rosnącego na wysokości działki 5/35 wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,”
2. § 1 ust. 7 na następujące: „Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 3 niniejszego porozumienia na 22 grudnia 2017 r."
2. § 2 ust. 3 na następujące: "Gmina Zawiercie posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego w 2017r."
3. § 11 na następujące: „Porozumienie w zakresie przygotowania i sfinansowania prac określonych w  § 1 ust.3 zawiera się na okres do 31 grudnia 2017 r.".
§ 2. 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.
§ 3. 
Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.
§ 4. 
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 5. 
Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Województwo Śląskie	Gmina Zawiercie	

 
WICEMARSZAŁEK

Stanisław Dąbrowa 

WICEMARSZAŁEK

Aleksandra Skowronek 	PREZYDENT

Witold Grim