Załącznik do Uchwały nr 2082/147/V/2016
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 13.10.2016 r.

Aneks Nr 10
z dnia .................... 2016 r.
do Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r.wraz z późniejszymi aneksami powierzającego Miastu Racibórz prowadzenie zadania pn.:„Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”
zawarty pomiędzy :
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:	
……………………..	……………………………..	
……………………..	……………………………..	
a	
Miastem Racibórz, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie umowy o współpracy z dnia 28 lutego 2012 r., reprezentowanym przez Prezydenta Mirosława Lenka
	
§ 1. 
Na podstawie § 8 ust. 2 w związku z § 4 ust. 7 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. wraz z aneksami (1-9)  Strony ustalają:
A. W § 1 ust. 6 przyjmuje brzmienie: „6. Zakłada się realizację zadania w latach 2012 – 2017.”
B. W § 4 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia dla zakresu dokumentacji opisanego w § 1 ust. 4 wynosi 3.729.610 zł (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziesięć złotych), w tym przewiduje się w kolejnych latach:
- w 2013 roku 18.450,00 zł
- w 2014 roku 206.640,00 zł
- w 2015 roku 99.527,50 zł
- w 2016 roku 1.959.234,25 zł
- w 2017 roku 1.445.758,25 zł”
C. W § 1 ust. 2 Aneksu nr 5 z dnia 2 marca 2015 r. przyjmuje brzmienie: „2. Koszt usługi Pomocy Technicznej, o której mowa w ust. 1 wynosi 131.610,00 zł. W 2015 r. wydatkowanie wyniosło 10.967,50 zł w 2016 roku planuje się wydatkować kwotę 82.256,25 zł a w 2017 roku 38.386.25 zł.”
D. W § 2 ust. 1 Aneksu nr 5 z dnia 2 marca 2015 r. przyjmuje brzmienie: „1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej na pisemne wnioski Prezydenta, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w latach 2015 – 2017 w transzach dostosowanych i odpowiadających rzeczywistym płatnościom za wykonane części składowe dokumentacji projektowej, które zostaną określone w odrębnych aneksach do Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r.”
E. W § 4e  ust. 1 przyjmuje brzmienie: „1. W roku 2016 koszt zadania na podstawie harmonogramu prac projektowych zakłada się na poziomie 1.743.648,00 zł z tego 1.133.371,20 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz
610.276,80 zł po stronie Miasta Racibórz. Całkowity koszt zadania określonego w § 1 ust. 1 w roku 2016 wyniesie 1.959.234,25 zł w tym 82.256,25 zł tytułem świadczenia usługi Pomocy Technicznej oraz 133.330,00 zł tytułem świadczenia usługi geodezyjnej.”
F. W § 4e ust. 2 przyjmuje brzmienie: „2. Zakres prac projektowych na rok 2016 obejmuje:
- wykonanie inwentaryzacji środowiskowej (niezakończone w roku 2014),
- wykonanie karty informacyjnej i raportu oddziaływania na środowisko (niezakończone w roku 2014),
- wykonanie projektu koncepcyjnego rozwiązań technicznych   (niezakończone w roku 2015),
- wykonanie wstępnego audytu bezpieczeństwa   (niezakończone w roku 2015),
- wykonanie mapy do celów projektowych   (niezakończone w roku 2015),
- przygotowanie materiałów do regulacji pasa drogowego (niezakończone w roku 2015),
- wykonanie mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi (niezakończone w roku 2015),
- wykonanie map zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie specustawy drogowej  (niezakończone w roku 2015),
- sporządzenie wykazu działek niezbędnych do realizacji inwestycji oraz geodezyjnych załączników do wniosku o wydanie decyzji ZRID (niezakończone w roku 2015),
- wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu (niezakończone w roku 2015),
- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (niezakończone w roku 2015),
- wykonanie inwentaryzacji zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz planu wyrębu(niezakończone w roku 2015),
- przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (niezakończone w roku 2015),
- wykonanie studium wykonalności,
- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy,
- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,
- wykonanie inwentaryzacji nieruchomości."
G. W § 4e ust. 3 przyjmuje brzmienie: „3.Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie kosztów prac projektowych, określonych w ust. 1, w transzach
na pisemne wnioski Prezydenta, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia. "
H. W § 4e ust. 3a przyjmuje brzmienie: „3a. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej określonej w § 4e ust. 2b na pisemne wnioski Prezydenta, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach dostosowanych i odpowiadających rzeczywistym płatnościom za wykonane części składowe dokumentacji projektowej, obejmujące świadczenie dodatkowej usługi geodezyjnej. Wnioski te winny być powiązane z transzami, o których mowa w ust. 3,  dotyczącymi płatności za części dokumentacji projektowej. "
I. Po § 4e dodaje się § 4f o następującej treści:
"§ 4f.
1. W roku 2017 koszt zadania na podstawie harmonogramu prac projektowych zakłada się na poziomie 1.140.702,00 zł z tego 741.456,30 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 399.245,70 zł po stronie Miasta Racibórz. Całkowity koszt zadania określonego w § 1 ust. 1 w roku 2017 wyniesie 1.445.758,25 zł w tym 38.386,25 zł tytułem świadczenia usługi Pomocy Technicznej oraz 266.670,00 zł tytułem świadczenia usługi geodezyjnej.
2. Szczegółówy zakres prac projektowych w 2017 r. określi aneks sporządzony po odbiorze i rozliczeniu prac zakładanych do wykonania w roku 2016."
§ 2. 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.
§ 3. 
Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.
§ 4. 
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 5. 
Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla
Miasta Racibórz oraz jeden dla Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie								 Miasto Racibórz