Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2471/156/V/2016
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 29.11.2016 r.

ANEKS nr 1
z dnia .........................

do Umowy nr 1026/KT/2016 z dnia 4.05.2016 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Miasto Racibórz na realizację zadania pn. „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”.

zawarty pomiędzy :

Miastem Racibórz, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie umowy o współpracy 
z dnia 28 lutego 2012 r., reprezentowanym przez 
Prezydenta Mirosława Lenka
a
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa 
w osobach:
…………………………………….				........................................................
…………………………………….				........................................................

§ 1
Na podstawie § 4 ust. 2 w związku z § 4 ust. 8 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. wraz z aneksami (1-10)
Strony ustalają:
A. W § 1 ust. 2 przyjmuje brzmienie: „Zakres rzeczowy określonego w ust. 1 zadania w roku 2016 obejmuje:
- wykonanie inwentaryzacji środowiskowej (niezakończone w roku 2014),
- wykonanie karty informacyjnej i raportu oddziaływania na środowisko (niezakończone w roku 2014),
- wykonanie projektu koncepcyjnego rozwiązań technicznych (niezakończone w roku 2015),
- wykonanie wstępnego audytu bezpieczeństwa (niezakończone w roku 2015),
- wykonanie mapy do celów projektowych (niezakończone w roku 2015),
- przygotowanie materiałów do regulacji pasa drogowego (niezakończone w roku 2015),
- wykonanie mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi (niezakończone w roku 2015),
- wykonanie map zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie specustawy drogowej (niezakończone w roku 2015),
- sporządzenie wykazu działek niezbędnych do realizacji inwestycji oraz geodezyjnych załączników do wniosku o wydanie decyzji ZRID (niezakończone w roku 2015),
- wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu (niezakończone w roku 2015),
- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (niezakończone w roku 2015),
- wykonanie inwentaryzacji zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz planu wyrębu(niezakończone w roku 2015),
- przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (niezakończone w roku 2015),
- wykonanie studium wykonalności,
- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy,
- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,
- wykonanie inwentaryzacji nieruchomości."
B. W § 2 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „ 1. Szacunkowy całkowity koszt zadania określonego w § 1 ust. 2 stanowiącego przedmiot umowy wynosi 1.825.904,25 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset cztery złote dwadzieścia pięć groszy) i składa się z:
	a)   1.743.648,00 zł przeznaczonych na prace projektowe,
	b)   82.256,25 zł przeznaczonych na świadczenia usługi Pomocy Technicznej.”

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. 

§ 4

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Województwa Śląskiego a jeden dla Miasta Racibórz.

Województwo Śląskie						                           Miasto Racibórz