Aneks Nr 1
z dnia .................... 2014 r.
do Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Wodzisław Śląski prowadzenia zadania pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej”
zawarty pomiędzy :
Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:	
…………………………..	………………………………………..	
…………………………..	………………………………………..	
a	
Miastem Wodzisław Śląski, siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 4, które występuje jako
partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie porozumienia o współpracy nr IM-U-019/2009 z dnia
18 czerwca 2009 r., reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Mieczysława Kiecę
	
§ 1. 
Na podstawie § 8 ust. 2 Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. Strony wprowadzają następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 1 przyjmuje brzmienie: "Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Wodzisław Śląski prowadzenia zadania p.n.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 933".",
2) W § 4 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia według zawartej umowy z wykonawcą wynosi 4.289.625 zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych), w tym przewiduje się w kolejnych latach:
- w 2014 roku 59.040 zł,
- w 2015 roku 4.230.585 zł.".
3) W § 4 ust. 2 przyjmuje brzmienie: „Miasto Wodzisław Śląski w imieniu gmin partnerów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% pierwotnie ustalonego kosztu zadania na 3.500.000 zł oraz w wysokości 90 % zwiększonych kosztów opracowania dokumentacji wynoszących 789.625 zł.”,
4) W § 4 ust. 4 przyjmuje brzmienie: „Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% pierwotnie ustalonego kosztu zadania na 3.500.000 zł oraz w wysokości 10 % zwiększonych kosztów opracowania dokumentacji wynoszących 789.625 zł.",
5) W § 8 ust. 3 przyjmuje brzmienie: "Realizacja budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych ustaleń.".
§ 2. 
Na podstawie § 4 ust. 7 Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. Strony ustalają:
1. W roku 2014 zgodnie z harmonogramem prac projektowych przewiduje się:
- wykonanie projektu koncepcyjnego i rozwiązań technicznych,
- wykonanie wstępnego audytu bezpieczeństwa,
- przygotowanie materiałów do regulacji istniejącego pasa drogowego,
- wykonanie oceny stanu technicznego istniejącej konstukcji nawierzchni,
- wykonanie pomiarów ruchu drogowego i prognozy ruchu.
2. W roku 2014 koszt zadania wynikający z harmonogramu prac projektowych łącznie wynosi 59.040 zł z tego 29.520 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 29.520 zł po stronie Miasta Wodzisław Śląski.
3. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Wodzisław Śląski środki finansowe dotacji celowej w kwocie łącznej określonej w ust. 2 na pisemny wniosek Prezydenta, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia, w tym środki stanowiące pomoc finansową Miasta Wodzisław Śląski (29.520 zł) oraz środki własne (29.520 zł), po wykonaniu prac projektowych, o których mowa w ust. 1.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu częściowego lub końcowego odbioru dokonanego przez Miasto Wodzisław Śląski zgodnie z § 6 ust. 3 porozumienia, rachunków i faktur oraz pozytywnych opinii ZDW i GDDKiA, o których mowa w § 2 ust. 2 i 4 porozumienia.
5. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.
6. W przypadku wystąpienia w 2014 r. kar umownych należnych od wykonawcy kary te podlegają zwrotowi na wskazany rachunek bankowy Województwa Śląskiego, w części równej udziałowi Województwa Śląskiego w kosztach realizacji opracowania określonej w ust. 2 wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą."
§ 3. 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.
§ 4. 
Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 5. 
Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla
Miasta Wodzisław Śląski oraz dwa dla Zarządu Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie								 Miasto Wodzisław Śląski