Aneks nr 1
do umowy nr 1171/NZ/2022
z dnia 19 kwietnia 2022 r.

zawarty w dniu
	…………………………..….	
		
pomiędzy
	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Województwem”	
		
reprezentowanym przez: 	1. ……………………………………………………………….………….…
2. ……………………………………………………………………………..	
		
z siedzibą
	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

a
	Szpitalem Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
wpisanym do rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000050139
zwanym dalej „podmiotem leczniczym”
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Joannę Niestrój-Ostrowską	
		
na podstawie
	Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.) oraz art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.)	
		
dotyczący
	umowy dotacji nr 1171/NZ/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 roku	

osoby nadzorujące realizację                  
umowy ze strony Województwa
	
Danuta Sobczyk  –  Dyrektor Departamentu  Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia
Agnieszka Barczyk – p.o. Zastępcy Dyrektora  Departamentu  
Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia.	

Strony zgodnie postanawiają o następującej treści:

§ 1
Dokonuje się zmiany umowy dotacji nr 1171/NZ/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. w następujący sposób:
1)	§ 1 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: „Województwo zobowiązuje się przekazać Podmiotowi leczniczemu dotację celową do kwoty 443 000  zł (słownie:  czterysta czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100), jednak nie więcej niż 99,69% kosztów zadania inwestycyjnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Fotowoltaika zamiast azbestu! Demontaż azbestowego dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach”, realizowanego w  ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego ( Edycja III).

2)	harmonogram rzeczowo - finansowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie jak                w załączniku do niniejszego aneksu.
3)	w § 3 ust.9 w miejsce słów: „31 października 2022 roku” wpisuje się słowa „30 listopada 2022 roku”.
4)	w § 6 ust.1 w miejsce słów: „31 października 2022 roku” wpisuje się słowa „30 listopada 2022 roku”.

§ 2
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3
Zapisy umowy nie objęte aneksem pozostają bez zmian.

§ 4
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Województwo Śląskie:	Podmiot leczniczy: