PROTOKÓŁ  KONIECZNOŚCI  NR 8/OP.Śl./2003
                                                                z listopada 2003 r.

Wykonania i zlecenia wykonawcy – robót dodatkowych  nie objętych zasadniczym wynagrodzeniem dla:     STRONY POŁUDNIOWEJ
                                        poz. nr 8 harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji

Miejscowość:                 BYTOM

Inwestycja:                    MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OPERY ŚLĄSKIEJ
                                        W BYTOMIU – PO POŻARZE

Inwestor bezpośredni:  URZĄD MARSZAŁKOWSKI  WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Inwestor zastępczy:     „INWESTPROJEKT-ŚLĄSK”  KATOWICE

Inspektor nadzoru:       „INWESTPROJEKT-ŚLĄSK”  K-ce -mgr inż. Józef Śliwa

Kierownik budowy:      P.B.O. i U.T. „ŚLĄSK” KATOWICE  -mgr inż. Bohdan Filipów

Użytkownik:                  OPERA ŚLĄSKA w Bytomiu

zawiadamiają o konieczności wykonania robót dodatkowych.

Opis i ilość robót: wykaz robót dodatkowych zawarty jest w załączniku nr 1 do protokołu
                              (roboty budowlane).

Uzasadnienie wykonania: patrz załącznik nr 1 do protokołu. 

Koszty robót dodatkowych:

 Koszt robót dodatkowych dla STRONY POŁUDNIOWEJ                 109.766,61 zł
                                                                             + VAT 7 %                        7.683,66 zł
                                                        DO ZAFAKTUROWANIA     117.450,27 zł
Podpisy:                                                                                                    ==============

1. .....................................................                          2. ......................................................

3. .....................................................                          4. ......................................................

                                                 Z A T W I E R D Z A M: