PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR 9/OP. Śl./2003
z listopada 2003 r.

Wykonania i zlecenia wykonawcy – robót dodatkowych  nie objętych zasadniczym wynagrodzeniem dla: STRONY PÓŁNOCNEJ
poz. nr 9 harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji

Miejscowość: BYTOM

Inwestycja: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OPERY ŚLĄSKIEJ W BYTOMIU – PO POŻARZE

Inwestor bezpośredni: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Inwestor zastępczy: „INWESTPROJEKT-ŚLĄSK” KATOWICE

Inspektor nadzoru: „INWESTPROJEKT-ŚLĄSK” K-ce -mgr inż. Józef Śliwa

Kierownik budowy: P.B.O. i U.T. „ŚLĄSK” KATOWICE -mgr inż. Bohdan Filipów

Użytkownik: OPERA ŚLĄSKA w Bytomiu

zawiadamiają o konieczności wykonania robót dodatkowych.

Opis i ilość robót: wykaz robót dodatkowych zawarty jest w załączniku nr 1 do protokołu
 (roboty budowlane, kanalizacja zewnętrzna, instalacje w-k, inst.elektr.).

Uzasadnienie wykonania: patrz załącznik nr 1 do protokołu. 

Koszty robót dodatkowych:

Koszt robót remontowo-budowlanych 					160.087,54 zł
Koszt kanalizacji zewnętrznej						   14.429,64 zł
Koszt instalacji wod.-kan.							   12.203,56 zł
Koszt instalacji elektrycznych						   11.279,15 zł
Łączny koszt robót dodatkowych dla STRONY PÓŁNOCNEJ	  197.999,89 zł
+ VAT 7 %		    13.859,99 zł
DO ZAFAKTUROWANIA  211.859,88 zł
Podpisy									==============

1. .....................................................			2. ......................................................

3. .....................................................			4. ......................................................

Z A T W I E R D Z A M: